급수공사 공사기간 연기

주무관		시설관리과장				결재
안규태		11/17 代고신석
협 조
	주무관				代이승영

신길1동 외 9개동 상수도공사 감독업무 수행중 아래와 같이 공사기간 연기사유가 발생하여 보고합니다.

2014. 11. 18

지방시설서기보  안 규 태

1. 공사기간 연기대상(신설-50)

위치	수요가	공사기간	작업지시번호	공사내역	시공업체
*******	***	2014.11.10 ~2014.11.17	신설-53	구경확대	*****
*******	***	2014.11.10 ~2014.11.17	신설-54	구경확대	*****

2. 공사기간 연기사유

- 공사장 내 작업여건 미비(휀스 및 비계설치)로 인하여 연기신청

3. 처리의견

상기 공사에 대하여 아래와 같이 공사기간을 연기토록 연간단가업체에 지시하여    급수공사에 만전을 기하고자 합니다.

- 당초 : 2014.11.10.~11.17.

- 변경 : 2014.11.10.~11.20.

붙임 : 작업연기원 각 1부.  끝.