문서번호	급수운영과-28370
결재일자	2014.11.17.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장	소장
박상권	오원선	안재엽	11/17 정운진
협 조

준공기한 연기 검토보고

(대현산배수지외 4개소 항청소용역)

2013. 11.

동부수도사업소

급 수 운 영 과

준공기한 연기 검토보고

*************************과 관련임. 본부 배수과에서 추진중인 고도 정수 처리시설 연결 공사로 인한 관련 배수지 항청소 금지 지시로 항청소 기간이 당초 공정보다 지연되어, 아래와 같이 보고합니다.

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 2014년 대현산배수지외 4개소 항청소 용역

○ 용역개요 : 항청소 293,937㎡

○ 용역기간 : 2014.04.04 ~ 2014.12.05

○ *******************

○ 용 역 비 : 246,563,000원

□ 보고 내용

○ 본부 배수과에서 추진중인 강북정수장 고도정수처리시설 연결공사및       암사 취수장 배관교체공사로 인한 항청소 금지지시로 청소기간이 변경됨

- 배수과 청소일정 재조정 요청(동부수도 급수운영과-9866, 11299, 13131)

• 관련근거

총 항청소 금지일수 : 36일

1) **************************************************

***********************

2) ****************************************

*************************

3) ***************************************

******************************

○ 2014년 배수지 항청소일정

•  배수지 항청소 기간 : 2014.4.14 ~ 2014.12.10

•  설계변경 및 정산 : 2014.12.11 ~ 2014.12.20

□ 보고자 의견

○ 상기 내용와 같이 시행중인 【************************】의

용역 수행기간이 부족하여 준공기한을 아래와 같이 연기코자 합니다.

- 준공기한 연기

• 당 초 : ‘14.04.04 ~ ’14.12.05.

• 변 경 : ‘14.04.04 ~ ’14.12.20. (15일 연기)

- 귀책사유 : 동부수도사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임 : 1) 관련공문 각1부

2) 2014년 배수지청소 세부추진계획 1부.  끝.