문서번호	도시철도설비부-10507
결재일자	2014.11.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설전기과장	도시철도설비부장
황영필		서태창	11/17 정찬웅
협조

- 지하철 9호선 917공구 정거장 전기공사 관련 -

터널조명설비 중복에 따른 수량정산 실정보고 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11

- 지하철 9호선 917공구 정거장 전기공사 관련 -

터널조명설비 중복에 따른 수량정산 실정보고 검토보고

인접 정거장(929정거장)과 터널 조명설비 중복에 따른 수량 정산 실정보고건에 대하여 검토하고 보고 드림.

Ⅰ		사업 개요

대지위치 : 9호선 2단계 917공구(930정거장)

규    모 : 정거장 1개소, 환기구 3개소

공사기간 : 2008. 06. 02 ～ 2014. 12. 31

계약금액 :  114,972백만원(전기 : 3,609백만원)

시 공 사 : GS건설(주)

감 리 사 : (주)유탑

Ⅱ		근 거

유탑전감 2014-530(2014.11.6.)호 “917공구(전기부문) 터널조명설비공사 중복에 따른 수량정산 실정보고”

Ⅲ		실정보고 내용

인접 정거장(916공구 929정거장)과 터널조명설비공사가 중복되어 수량정산

- 당  초 : 터널전등 174등, 터널복합등 48등, 터널콘센트함 36개

- 변  경 : 터널전등 130등, 터널복합등 32등, 터널콘센트함 25개

공사비 증감내용

구 분		변경전	변경후	증 감	비 고
917공구	930정거장	101,876,691	68,944,804	- 32,931,887

책임감리단 의견

- 터널조명설비공사 중복에 따른 공사비 증감은 추후 설계변경 시 정산하고자 함.

Ⅳ		검토 결과

인접한 916공구 929정거장과의 터널조명설비공사 중복에따른 수량정산은 적정한 것으로 판단되므로 실정보고를 승인하고,

9호선 3단계 구간인 918공구 931정거장과 경계지점의 터널조명설비는 정산되지 않았으므로, 이를 감리단에 통보하여 추후 설계변경시 정산처리토록 하고자 함.

따로붙임 : 실정보고 승인 요청 문서 1부.  끝.