문서번호	치수과-4109
결재일자	2014.11.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
방호익		김용제	11/17 차광재
협조
	주무관		박정태

현장여건 변동에 따른 실정보고

- 한강공원 나들목 증설공사(신청담) -

2014. 11.

현장여건 변동에 따른 실정보고

- 한강공원 나들목 증설공사(신청담) -

신청담 나들목 도달기지 줄파기 작업중 가시설 구간내 구 con’c 도로 저촉으로 항타작업이 불가하여 원활한 작업을 위해 추가 줄파기 시행 및 콘크리트깨기 작업반영에 따른 검토보고임

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 한강공원 나들목 증설공사(신청담)

○ 공사기간 : '13. 4. 25 ~ '15. 12. 20

○ 도 급 액 :  8,410백만원

○ 공사규모 : 보행자전용 나들목 신설 (육갑문 및 E/V 2개소 설치)

( 폭 5m, 높이 3.5m, 길이 83.5m)

○ 시 공 사 : 한양개발(주)

○ 감 리 사 : ㈜동일기술공사, ㈜수성엔지니어링

○ 위    치 : 강남구 청담동 영동대교 남단 하류

Ⅱ		감리단 보고내용

○ 관련근거 : 동감(신청담) 제14-33호(2014.11.17)

○ 현    황

▶ 도달기지 줄파기 작업중 가시설 구간내 기존 con’c 도로 노출로   쉬트파일 항타작업이 불가한 실정임

▶ 기존 con’c 도로 현황

○ 처리방안

▶ 도달기지 가시설 구간내 기존 con’c 제거 (A=305㎡,t=30cm,V=91.5㎥)

▶ 도달기지 가시설 구간내 안전성확보에 따른 줄파기 추가시행(L=86m⇒L=236m)

Ⅲ		소요예산

❍ 수량 변경사항

구 분	단위	당 초	변 경	증 (감)		변경사유	비고
1. 터파기	㎥	3,351	3,260	감	91	항타작업에 따른 콘크리트제거
2. 잔토운반	㎥	10,546	10,455	감	91
3. 줄파기	m	86	236	증	150
4. 무근콘크리트깨기	㎥	-	91	증	91
5. 폐기물 상차	㎥	-	91	증	91

❍ 개략 공사비 증․감 현황

(단위 : 천원)

공 종	당 초	변 경	증 · 감		비 고
1. 터파기	10,985	10,686	감	299
2. 잔토운반	137,731	136,542	감	1,189
3. 줄파기	2,939	8,065	증	5,216
4. 무근콘크리트깨기	-	1,515	증	1,515
5. 폐기물상차	-	302	증	302
6. 제경비(VAT포함)	57,845	61,290	증	3,445
계	209,500	218,400	증	8,900

Ⅳ		조치의견

○ 상기 감리단의 보고 내용과 같이 공사진행에 불편을 최소화 하고자        우선 도급자로 하여금 작업시행토록 하고, 향후 설계변경시 반영 조치        코자 함.

붙임 : 감리단 검토의견서 1부. 끝.