문서번호	급수운영과-28330
결재일자	2014.11.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
박종대		김광운	11/17 안재엽
협 조

설계변경 심의 위원회 개최 결과보고

(2014년 성동구 관내 송배수관정비공사 등 건설폐기물처리용역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.11.

동부수도사업소

(급수운영과)

『2014년 성동구 관내 송배수관정비공사 등 건설폐기물처리용역』

설계변경 심의 위원회 개최 결과보고

우리사업소 시행중인『2014년 성동구 관내 송배수관정비공사 등 건설폐기물처리용역』에 대한 설계변경 심의 위원회를 개최하고 그 결과를 아래와 같이 보고함.

Ⅰ		용역현황

가. 용 역 명 : 2014년 성동구 관내 송배수관정비공사 등 건설폐기물처리용역

나. 용역기간 : 2014.04.17. ~ 2014.11.30.

다. 계약업체 : **************

라. 물량증감 내역

공종	품목	단위	당초수량	변경수량	비고(증․감)
폐기물운반	계	㎥	714	720	증) 6
	폐아스콘	㎥	634	703	증) 69
	폐콘크리트	㎥	50	17	감) 33
	폐토사	㎥	30	-	감) 30
폐기물처리	계	ton	1,655	1,691	증) 36
	폐아스콘	ton	1,489	1652	증) 163
	폐콘크리트	ton	115	39	감) 76
	폐토사	ton	51	-	감) 51

마. 용역금액 변경내역

(단위:원)

구분	당초	변경	비고(증․감)
총 용역비	37,119,000	37,940,000	증) 821,000
공급가액	33,744,546	34,490,910	증) 746,364
부가세	3,374,454	3,449,090	증) 74,636

Ⅱ		심의 위원회 개최사항

가. 개최일자 : 2014.11.17.(월) 14:00

나. 개최장소 : 3층 회의실

다. 참석위원 : 급수운영과장 외 6명

라. 검토내용

- 공사별 폐기물 물량 증․감에 따른 설계변경 적정성 검토

마. 검토결과 : 위 검토내용에 대하여 적정하다는 심의의견을 제시함.

Ⅲ		향후계획

설계변경 심의 위원회 개최결과 심의위원 모두 적정하다는 의견을 제시되었으므로, 이를 설계변경 내역에 반영하여 우리사업소 행정지원과에 변경계약 의뢰하고자 합니다.

첨 부 : 1) 설계변경 심의 의뢰서 1부.

2) 설계변경 내역서 1부.

3) 심의위원회 의견서 1부. 끝.