문서번호	시설관리과-24160
결재일자	2014.11.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
서장원		손종백	전결 11/17 이자원
협조

·

기   성   보   고   서

(2014년 강서구 관내 시설물 설치 및 보수공사(장기계속공사))

2014. 11

강서수도사업소

(시설관리과)

명에 의하여 『2014년 강서구 관내 시설물 설치 및 보수공사(장기계속)』와 관련, 기성금 신청(2차) 현황을 아래와 같이 보고합니다.

1. 공사 현황

가. 공 사 명 : 2014년 강서구 관내 시설물 설치 및 보수공사(장기계속공사)

나. 착 공 일 : 2014.04.02

다. 준공기한 : 2015.03.31

라. 도 급 액 : 622,096,520원

마. 도 급 자 : 나일건설  대표 : 이 춘 화

2. 기성금 신청현황

가. 위    치 : 강서구 가양동 1495번지외 68건

나. 금회공사기간 : 2014.06.20. ~ 2014.10.31

다. 기성 금액(2차) : 98,400,000원

라. 예산과목별 지출액

(단위: 원)

구 분	정산금액	구분 확인제 지출액(기 지출액)	금회(정산)지출액	비고
합 계	98,400,000	21,257,500	77,142,500
시설비(노후밸브정비)	84,430,000	18,191,700	66,238,300	노무비 (‘14/9,10월분)
수선교체비(배수지환경정비)	3,860,000	3,065,800	794,200	노무비 (‘14/10월분)
소방용수시설 보수	10,110,000		10,110,000

3. 기성 내역

가. 기성내역

(단위: 원)

구 분	계 약 금 액	전회까지 기성금액(1차)	금회 기성금액 (2차)	기성 합계	잔 액
도 급 액	622,096,520	123,100,000 (19.8%)	98,400,000 (15.8%)	221,500,000 (35.6%)	400,596,520 (64.4%)

나. 공사개요

(단위:개소)

계	노후밸브정비	변실정비	배수지환경정비	소화전신설 및 보수	비 고
69	21	39	1	8

4. 처리 의견

○ 상기와 같이 2014년 강서구 관내 시설물 설치 및 보수공사 기성(2차)을 시행코자

합니다.

붙임 : 1) 기성내역서(2차) 1부.

2) 구분확인제 지출현황 1부.

3) 기성검사 공문(시설관리공단) 1부.  끝.