투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	『2014년 도로시설물 세척용역』 설계변경 시행(제1회)

우리 사업소에서 시행중인 『2014년 도로시설물 세척용역-동부』에 대하여 아래와 같이 설계변경(제1회) 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 2014년 도로시설물 세척용역 - 동부

나. 용역기간 : 2014. 3. 31. ~ 2015. 2. 28.

다. 도 급 자 : 삼심아이앤씨  대표 김민건

라. 변경사유 : 세척물량 증․감에 따른 설계변경

마. 변경내역                                                   (단위 : 원)

구 분		금 액		증 ․ 감	비 고
		당 초	변 경
총용역비		140,801,000	160,710,000	증)19,909,000
도급비	공급가액	128,000,909	146,100,000	증)18,099,091
	부가가치세	12,800,091	14,610,000	증) 1,809,909
	계	140,801,000	160,710,000	증)19,909,000

바. 예산과목

- 도시안전실, 교량관리, 교량시설물운영, 도로시설물(교량관리)일상유지보수,

시설비및부대비, 시설비 - (증19,909,000원)

붙 임   1. 설계변경(1차) 검토보고서 1부.

2. 세척용역 설계변경내역서 1부.  끝.

주무관	김호규		시설보수과장	박용선		동부도로사업소장	11/17 송상영
협조자	주무관	이민호		계약1팀장	김점선
시행	시설보수과-4369	(		)	접수		(		)
우	135-834	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)2040-0370	/전송	02)2040-0308	/	khguy123@seoul.go.kr	/	대시민공개