문서번호	하천관리과-18103
결재일자	2014.11.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	청계천관리팀장	하천관리과장		물관리정책관
이병우	김석권	김용학		11/17 김학진
협 조

「청계천 경사면 수종교체 사업」검토 보고

(축산물시장 ~ 제2마장교)

2014. 11.   .

도시안전실

(하천관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(	주민참여 예산요구	)		무 □
	●	이해당사자	:	유 ■	(	지역주민, 일반시민	)		무 □
	●	전문가	:	유 ■	(	청계천시민위원회	)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(	성동구청	)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(	청계천시민위원회	)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(	시설관리공단	)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

「청계천 경사면 수종교체 사업」검토 보고

2014년 예산안 심의시 추가된『청계천 경사면 수종교체 사업』에 대한 처리방안 검토 보고 임

□  사업개요

○  위 치 : 청계천 마장2교 ~ 축산물종합시장

○  규 모 : 개나리 등 제거 8,000㎡, 제방사면 녹화 6,000㎡,  폐기물처리  등

○  확보예산 : 600백만원

○  사업기간 : 2014. 2 ~ 2014. 12.

□  추진경위

○  2013. 4 : 주민참여 예산제 시행에 따른 주민 제안

- 청계천 생태분과 논의결과 현재상태를 유지하는 것이 바람직(예산 미반영)

○  2013. 12 : 2014년 예산심의과정에서 사업추가(예결위 박양숙 의원)

- 사업명 : 청계천 경사면 수종갱신 사업, 예산 : 600백만원

○ ’14.7월 : 기본 및 실시설계에서 추가검토필요 (생태환경분과위원회)

- 시의원 요구사항으로 진행중인 기본 및 실시설계 용역에서 검토

○ ’14.10월 : 용역 검토 및 전문가 자문의견 (조경전문가)

- 개나리 군락 상태 양호하므로 존치의견 제시(사업 강행시 반대민원 예상)

○ ’14.11.13 : 청계천 개나리 전정 등 예산요청(성동구→시 하천관리과)

□ 문제점 및 조치방안 검토

○ 문제점

- 2014년도 편성예산 600백만원 불용예상

·  청계천시민위원회 논의결과 임상양호 개나리 군락 존치 의견제시

· 개나리 밀식으로 청소공간 미확보 등으로 관리불량 및 미관 개선 지속요구

○ 검토 및 조치방안

- 밀식 개나리 전정을 통한  청소 등 최소한의 관리공간 확보 필요

· 성동구 사업요구 구간(축산물시장~마장2교) 개나리 전정 등 정비공사 허용

- 개나리군락 존치하되 전정 등 정비공사 소요예산 성동구에 재배정

· 예산요구액 : 100백만원, 사업내용 : 밀식 개나리 전정(A=60a), 잔재처리

- 잔여사업비 500백만원에 대하여는 현재 추진 중인 청계천 생태환경 개선사업에 활용

□ 예산 재배정 계획

○ 확보예산 : 600백만원

사업명	확보예산	금회 재배정	잔액	비고
청계천 경사면 식재 수종교체 (마장2교 ∼축산물 종합시장)	600	100	500	개나리 전정등 정비공사

○ 예산과목 : 도시안전실 하천관리과, 치수 및 하천 관리, 생태하천 복원, 하천            복원 및 정비, 청계천 경사면 식재 수종교체, 시설비(100-401-01)

○ 재배정처 : 성동구 안전치수과

□ 향후 계획

○ 2014. 11. 19 : 사업시행 방침 및 예산 재배정 (市 하천관리과→성동구)

○ 2014. 12~2015.02월 : 계약 및 공사 시행(성동구)

○ 2015. 03월 이후 : 청계천 경사면 유지관리(성동구)

붙임 : 청계천 개나리 전정(성동구 요구자료) 1부.  끝.