투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	노원구청장(토목과장)
(경유)
제목	도로점용(굴착,복구) 허가기간 연장신청

1. 공릉2빗물펌프장 신설공사와 관련하여 도로점용(굴착, 복구)허가된 사항에 대하여 아래와 같이 허가기간을 연장신청하오니 공릉동일대 침수예방사업임을 감안하시어 처리하여 주시기 바랍니다.

공사위치	공사개요	도로점용(굴착,복구) 허가기간		변경사유	비고
		변경전	변경후
공릉동406-5~496-2	유입관로설치 L=320m	2013.10.2.~ 2014.11.30	2013.10.2. ~ 2015.6.30	2014년 수방기간 간이펌프장 사용에 따른 공기연장
공릉동405-1~406-3	유입관로설치 L=90m	2013.10.3.~ 2014.11.30	2013.10.3. ~ 2015.6.30

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김학지		방재시설과장	서관석		방재시설부장	11/18 임춘근
협조자
시행	방재시설부-11792	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/
전화	02)3708-8765	/전송	02)3708-8756	/	hjk570@seoul.go.kr	/	대시민공개