함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	공사 준공기한 변경계약 체결 보고(광암정수센터 조명시설 LED광원 개선공사)

1. 정수시설과-2872(2014. 11. 14.)호와 관련입니다.

2. 『광암정수센터 조명시설 LED광원 개선공사』에 대하여 아래와 같이 변경계약을 체결하고 보고합니다.

가. 공사개요

- 공 사 명 : 광암정수센터 조명시설 LED광원 개선공사

- 계약금액 : 금143,478,370원(금일억사천삼백사십칠만팔천삼백칠십원)

- 공사기간

․ 당초 : 2014. 07. 21. ~ 2014. 11. 17.

․ 변경 : 2014. 07. 21. ~ 2014. 12. 26.

- 계약상대자 : 주식회사 태강  대표 : 김상민

나. 연기사유 : LED광원개선 국비매칭사업(자체 70%, 국비 30%) 국고보조금이                  최근에 배정되어 추가 공사에 따른 설계변경사항 및 기존 계약물량의 증감                  조정 등 사정변경으로 공사지연이 발생하여 공사기한 연장

붙임  1. 공사변경계약체결통보서 및 방침서 등 각 1부.  끝

주무관							유혜영				정수운영과장					손호철					광암아리수정수센터소장					11/18 차윤기
협조자				주무관							박희준					정수시설과장							김창현
시행			정수운영과-9185										(						)		접수												(						)
우	465-230					경기도 하남시 서하남로 293																/
전화		02-3146-5313							/전송			02-3146-5309					/														/	대시민공개