투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신	내부결재
(경유)
제목	지연배상금 세입조치(선유수질측정소 환경개선 공사)

「선유수질측정소 환경개선 공사」 공사계약건의 준공일자 지연에 따른 지연배상금을 아래와 같이 세입조치 하고자 합니다.

1. 계약 및 준공․ 검수내역

가. 건    명 : 선유수질측정소 환경개선 공사

(계약번호 : 20141*******00)

나. 계 약 자 : 유일상사 : 217-10-24254, 대표자 : 강윤자)

주소 – 서울특별시 도봉구 노해로62길 40

다. 계약금액 : 금15,372,500원(금일천오백삼십칠만이천오백원)

라. 계약연월일 : 2014. 10.08.

마. 준공기한 : 2014. 11.07.

바. 준공일자 : 2014. 11.13.

사. 검사합격년월일 : 2014. 11.13.

2. 지연배상금 납부액 : 금92,240원(금구만이천이백사십원)

가. 산출내역 : 금15,372,500원(계약금) ×0.1%×6일(지체일수)

3. 납 부 자 : 유일상사(대표자 : 강윤자)

4. 납부방법 : 대금지급시 지연배상금을 제외한 금액으로 지급하고, 지연배상금은

우리시 세무과 전용계좌로 입금조치

5. 세입과목 : 세외수입, 임시적세외수입, 잡수입, 위약금 및 지체상금.  끝.

주무관	강영호		주무관	주우민		연구지원부장	11/18 이형우
협조자	경리팀장	최종환
시행	연구지원부-11769	(		)	접수		(		)
우	156-010		/
전화	02-570-3345	/전송	02-570-3320	/	kim72520@seoul.go.kr	/	대시민공개