문서번호	건축부-13779
결재일자	2014.11.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		건축관리과장	건축부장
전재진		곽동호	전결 11/18 김우성
협 조

「신림2 빗물펌프장 설치건축공사」

책임감리원 실정보고 검토 결과 보고

2014. 11.

도시기반시설본부

건 축 부

「신림2 빗물펌프장 설치공사」

책임감리원 실정보고 검토 결과 보고

『신림2 빗물펌프장 설치공사』책임감리원으로부터 제출된 건축마감공사와 관련하여 설계변경 실정보고를 검토 보고

□ 공사개요

○ 위    치 : 관악구 신사동 496번지 일원

○ 건립규모 : 지상2층, 연면적 820.04㎡

○ 공사기간 : '13. 01. 04 ～'14. 12. 15

○ 건축공사도급액 : 1,556백만원

○ 시 공 사 : 임원개발(주)

○ 감 리 사 : (주)도화엔지니어링

○ 현 공 정 : 외장판넬 설치공사중(공정율 75%)

□ 추진경위

○ 2014.07.01. : 건축공사 착수

○ 2014.11.12. : 책임감리원 실정보고

□ 실정보고 내용

○ 신림2 빗물펌프장 설치공사 중 건축마감공사에 대한 설계변경

1) 전기실 및 펌프실 내부 마감자재 및 공사수량 변경

2) 펌프실 창호수량 및 관리실 유리규격 변경

3) 관리실. 사택 칸막이 변경 및 계단실 마감재 공사수량 변경

4) 자재창고동 설계변경

○ 관악구청 요구사항 및 설계도서 조정관련 공사비 증감 검토

연번	구 분	금 액			비고
		당 초	변 경	증, 감
1	자재비	75,447,694	80,977,103	증) 5,529,409
2	노무비	43,171,516	56,705,672	증) 13,534,156
3	경 비	967,931	3,941,440	증) 2,973,509
소 계 (직접공사비)		119,587,141	141,624,215	증) 22,037,074
4	원가계산	60,973,949	73,733,506	증) 12,759,557
5	도급공사비	180,561,090	215,357,721	증) 34,796,631
6	관급자재비	28,872,771	22,183,369	감) 6,689,402
총 공사비		209,433,860	237,541,090	증) 28,107,230

(단위:원)

□ 감리단 검토 의견

○ 관악구청 요구사항 및 설계 누락사항등에 대하여 검토한 결과 타당하다고 판단되어 실정보고

□ 처리의견

○ 책임감리원의 의견이 적정하다 판단되므로 우선 선시공하고 추후, 실정보고 사항에 대하여는 설계변경 처리코자함.

붙 임 : 책임감리원 검토의견서 1부.  끝.