투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	변경계약의뢰(남산1호터널 소화전배관 교체공사)

우리 사업소에서 시행중인 『남산1호터널 소화전배관 교체공사』건에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고 계약의뢰하니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 남산1호터널 소화전배관 교체공사

2. 공사기간 : 2014.06.02. ~ 2014.11.28.

3. 도 급 자 : ㈜남일기업 대표 이범석

4. 설계변경사유 : ″설계변경 보고″ 참조

5. 설계변경 내역                                    (단위 : 원)

구 분		당초금액	변경금액	증·감	비 고
총공사비		659,842,410	579,470,100	감) 80,372,310
도급비	공급가액	599,856,737	526,791,000	감) 73,065,737
	부가가치세	59,985,673	52,679,100	감) 7,306,573
	계	659,842,410	579,470,100	감) 80,372,310

6. 예산과목 : 도시안전실 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리(도시개발특별회계), 남산1호터널외 5개소 노후방재설비 보완공사, 시설비

붙임  1. 설계변경시행 1부

2. 변경설계서 1부

3. 제비율검증 1부

4. 합의각서 1부

5. 설계변경보고 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	김진종		기전과장	장경옥		서부도로사업소장	11/18 김만수
협조자
시행	기전과-10615	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울 마포구 가양대로 203	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8406	/전송	02-300-8410	/	jeanjong@seoul.go.kr	/	대시민공개