문서번호	도시철도토목부-12680
결재일자	2014.11.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		토목1과장		도시철도토목부장
황왕연		김성호		11/18 한동근
협 조

『917공구 아시아공원 복구 관련』

송파구청 협의결과 보고

2014. 11

서울시도시기반시설본부

(도시철도토목부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

『917공구 아시아공원 복구 관련』

송파구청 협의결과 보고

930정거장으로 편입된 아시아공원 원상복구와 완련 복구계획을 송파구청에 제출하였으나, 복구 범위 및 수목규격 확대, 공원등, CCTV설치 등 추가 요구 사항이 있어 송파구청을 방문 복구 방안에 대한 협의 결과를 보고드림

Ⅰ		공원 점용현황

○ 위    치 : 송파구 잠실동 84

○ 점용면적 : 1,534㎡

※ 송파구 추가 복구 요구 : 3,838㎡(교통초소 주변 1,201㎡, 인접산책로 1,407㎡, 벤치 주변 1,230㎡)

○ 점용기간 : ‘10. 02. 22 ~ ’14. 12. 31

○ 수목이식현황(81주)

- 느티나무  34주, 은행나무 12주, 감나무 24주, 살구나무 2주, 소나무 2주, 플라타나스 4주, 단풍나무 1주, 수수꽃다리 1주

Ⅱ		추진경위

○ ‘09.11.11 : 행정2부시장 방침(제604호)

- 930정거장 위치이동 방침

○ ‘10.02.18 : 공원 점용허가(정거장, 송파구→본부)

○ ‘11.08.02 : 공원 원상복구계획 제출(본부→송파)

- 아시아근린공원 재조정계획에 맞추어 복구계획 제출

○ ‘13.02.20 : 공원 추가점용 허가(출입구, 송파구→본부)

○ ‘14.02.18 : 점용기간 연장승인(송파구→본부)

○ ‘14.09월 : 본부 공사관리관 구청방문 복구계획 협의

- 아시아근린공원 재조성계획 시기 불확정으로 현재의 공원에 맞추어 복구계획 수립 협의

○ ‘14.10.02 : 공원 복구계획 통보(본부→송파구청)

○ ‘14.10.21 : 송파구청 추가부분 복구 요청

○ ‘14.11.05 : 본부 공사관리관 구청방문 추가요청부분에 대한 협의

Ⅲ		공원 복구관련 협의개요

○ 일    시 : ‘14. 11. 05(수) 15:30

○ 장    소 : 송파구청(푸른도시과 회의실)

○ 협의목적 : 아시아공원 복구관련 송파구 추가요구사항 협의

○ 참석자 : 본부(황왕연), 송파구청(공원팀장 최희정, 업무담당), 책임감리원, GS건설 공무담당

○ 주요의견

- 본  부 : 송파구청 복구면적 확대요청 및 수종 규격 상향, 공원등 설치, CCTV신설 요구사항 반영시 복구비용 과다로 수용 곤란 설명

- 송파구청 : CCTV, 체력단련 시설등은 복구계획에서 제외하여도 무방하나 수종확대 등은 반영 요망

Ⅳ		구청 요구사항 및 처리방안

구 분	송파구 요구사항	본 부 의 견	비고
일반사항	○복구범위 확대요청 -교통초소 부분까지 정비요망 -점유부분과 인접된 산책로 재포장 요망	○복구범위 -교통초소부(1,201㎡) 복구 곤란 -인접산책로(1,407㎡)는 지하철 출입구와 연계되는 관계로 고무칩포장(오버레이)
	○LID기법 반영요망 ※LID기법:산책로를 녹지대보다 높게 설치하여 빗물이 녹지대로 유입되도록 하는 기법	○복구계획에 반영
	○복구공사 시기 불투명	○결빙전 식재 완료예정
식 재	○소나무 추가 식재(H8×R30이상)	○추가식재:10주(R25) ※규격 상향조정 미반영
	○이팝나무 등 청단풍,홍단풍은 R15로 규격 상향조정	○42주 식재(R10) ※규격 상향조정 미반영
	○자작나무는 대상지 평균기온 등을 고려할 때 생육 저하가 우려되므로 교체 검토	○교체(자작→팥배나무):24주(R10)
	○뽕나무 등 지역 역사성과 관련된 수종으로 교목 추가반영	○기존 휴게공간 철거후 뽕나무 추가식재

구 분	송파구 요구사항	본 부 의 견	비고
식 재	○공원내 기존 수목에 대해서는 현장내에서 재배치 검토	○전체적으로 재정비에 해당되는 사항으로 미반영
	○전체적으로 녹지대가 피복될 수 있도록 관목 및 지피류 추가식재 및 수종 재검토	○미반영
시설물	○체력단련시설(야외형 운동기구) 설치검토	○미반영
	○경관석은 규격 및 이미지 구체화	○반영예정
	○확대복구 대상지는 기존 노후 휴게시설 교체 및 추가설치 검토	○노후시설 철거후 뽕나무 추가식재
	○퍼골라내 의자배치 및 지붕의 길이는 빗물이 들이치지 않도록 하고 채광창 색상은 직사광선을 피할 수 있도록 색상톤으로 검토	○반영예정
기 타	○포장공사시 보도공사 설계.시공 매뉴얼 참고하여 시공할 수 있도록 검토	○반영예정
	○CCTV설치검토	○광통시망 추가설치 등으로 반영 곤란
	○공원등 설치검토 -디자인을 고급화하고 컷오프형의 제품으로 선정 -적정 조도를 유지하고 서울시 공원등 설치기준에 의거 설치	○공공디자인 심의 대상이 아닌 제품으로 설치예정(13등)
	○기존 배수체계를 고려하여 집수정, 우수트랜치 등 배수시설 설치검토	○산책로중 저지대에 빗물받이 등 배수시설 설치

Ⅴ		향후조치계획

○ 송파구청 요구사항을 일부 반영하여 복구계획을 수립 유지관리부서에 통보코자하며, 동절기 결빙전 복구 완료토록 조치코자 함.

첨부  1)송파구 복구 요구 도면  1부.

2)복구계획 도면 및 공사착수 단계 전경사진  1부.   끝.