문서번호	외국인다문화담당관-13534
결재일자	2014.11.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		글로벌센터운영팀장	외국인다문화담당관
이용범		이강년	11/18 윤희천
협 조

서울글로벌센터 인테리어 공사 실시설계 용역계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

여성가족정책실

(외국인다문화담당관)

서울글로벌센터 인테리어 공사 실시 설계 용역계획

외국인주민 글로벌 창업지원 사업 확대운영을 위한 서울글로벌센터빌딩 6~7층 공간에 대한 효율적인 활용을 위한 시설개선 설계 용역을 실시하고자 함

□ 추진근거

○「글로벌 창업 활성화 계획」(시장방침 제241호. ‘14.9.7)

	< 시장 요청사항('14.7.19) >
▸ 외국인주민 창업활성화 지원방안을 마련하여 주시기 바람 - 동포인력 활용 마케팅사업단 양성을 위한 무역아카데미 설치·운영 ⇒ 중소기업 수출증대 - 외국인주민 창업기금 설치 - 창업지원플라자(창업공간·정보제공, 창업핫라인, 창업자 살롱 등) 설치

○ 서울특별시 외국인주민 및 다문화가족 지원 조례 제7조(지원의 범위)

○ 서울글로벌센터 인테리어 공사 계획(외국인다문화담당관-13498, 2014.11.18.)

□ 추진방향 및 필요성

○ 서울글로벌센터 방문 시 편안함을 느낄 수 있도록 공간 구성이 필요

○ 다양한 건축관련 법규의 준수를 고려한 전문적 지식이 요구됨

○ 효율적 공간 배치와 활용이 가능하도록 전문적 지식이 요구됨

○ 예산 절감을 위하여 현 센터의 재활용 가능 물품 등에 대한 재배치

○ 기존 시설의 인테리어와 통일성을 고려한 설계가 요구됨

□ 설계용역 개요

○ 위    치 : 종로구 종로 38(서린동) 서울글로벌센터빌딩 6~7층

○ 공사규모 : 693.53㎡(6층 302.06㎡, 7층 390,93㎡) 내외

○ 설계내용 : 지정된 장소 범위 내에서 인테리어 등 실시설계

- 건축, 전기, 통신공사 등에 필요한 설계도서 및 투시도 등

○ 계약방법 : 수의계약

○ 수의계약 사유

- 공개입찰을 할 경우 설계도서 완료시까지 30일 이상 소요될 것으로 판단되며, 이전 시기 등 사업의 목적을 달성하기 위하여 용역 금액이 소액이고 관련 규정에 의거 수의계약 가능

※ 근거법령  : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 제1항 제5호

○ 용역기간 : 계약일로부터 20일

○ 소요예산 : 금14,300,000원(금일천사백삼십만원)

- 외국인다문화담당관, 글로벌 도시환경 및 선진 다문화사회 조성, 외국인 생활 지원강화, 외국인지원시설 설치․운영, 시설비

□ 설계용역 주요내용

○ 6층 주요 시설배치 및 인테리어 공사

- 인큐베이션오피스, 공동사무실, 협업라운지 공간 조성

- 안내데스크 및 상부 등박스 설치 등

○ 7층 주요 시설배치 및 인테리어 공사

- 네트워킹 룸(살롱), 사무실, 상담실 회의실 설치

- 중소기업 제품 전시관, 안내데스크 및 상부등박스 설치 등

□ 향후 추진일정

○ ‘14.11.18. : 인테리어 설계 발주

○ ‘14.12.08. : 인테리어 설계 완료

붙임 : 서울글로벌센터 인테리어 실시설계용역 과업지시서 1부.  끝.