문서번호	기전과-10582
결재일자	2014.11.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전과장	서부도로사업소장
구희천	장경옥	11/18 김만수

『2014년도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)』

설 계 변 경(증액) 보 고

2014.  11.

서부도로사업소

(기전과)

『2014년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)』

설  계  변  경(증액)  보  고

『2014년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)』와 관련하여 아래와 같이 설계변경사항(증액)이 발생하여 보고드립니다.

공 사 현 황

공 사 명 : 2014년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

공사기간 : 2014. 3. 11. ~ 2015. 2. 28.

공사금액 : 금96,667,170원(금구천육백육십육만칠천일백칠십원)

도 급 자 : ㈜용상전기통신 대표 권 혁 기

공사규모 : 가로등 및 지하차도 기전시설물 유지보수 1식

설계변경(증액)내역

설계변경(증액) 사유 : 물량 증감 및 신규 공종 추가

- 남산 2. 3호 터널 부점등 및 누전선로 보수

설계변경(증액)금액 : 금29,854,830원

구 분		금 액(원)			비 고
		당 초	변 경	증 감
총 공 사 비		96,667,170	126,522,000	29,854,830	증
도급비	공 급 가 액	87,879,246	115,020,000	27,140,754	증
	부가가치세	8,787,924	11,502,000	2,714,076	증
	계	96,667,170	126,522,000	29,854,830	증

예산과목

- 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비

보고자의견

상기 공사의 당초 설계내역서에 반영되지 않은 물량 및 신규 추가 공종에 대하여 설계변경(증액) 시행하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 설계변경내역서 1부.

2. 제비율검증  1부.  끝.