투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	서울 거리예술센터 조성 전기공사 설계변경(제1회) 시행 및 계약 요청

1. 우리 본부에서 시행중인 「서울 거리예술센터 조성 전기공사」에 대하여 설계변경 사항이 발생하여 아래와 같이 변경 계약요청을 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울 거리예술센터 조성 전기공사

나. 공사기간 : 2014.10.13. ~ 2015.02.28.

다. 계 약 자 : 스마트전력 주식회사 대표 김재만

라. 계약금액 : 금408,393,730원

마. 설계변경 내역

구 분	변 경 전	변 경 후	증․감	비 고
계 약 금 액	408,393,730원	436,920,000원	증)28,526,270원	-계약금액 증액 -공사기간 변경없음

※ 설계변경 사유 : 재사용 동력시설물(모터) 전원 공급방식 변경 및 당초 계약물량 증․감 발생

바. 예산과목 : 문화정책과, 문화도시 서울구현, 문화향유공간 및 문화기반시설조성, 미래유산보존 및 활용, 시설비 및 부대비, 시설비

따로붙임 : 1. 설계변경 검토 보고서 1부

2. 설계변경내역서(제1회) 1부

3. 설계변경합의서(제1회) 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김두환		환경설비과장	이달영		설비부장	11/18 박기형
협조자	계약1팀장	김점선
시행	설비부-12923	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동(2층) 도시기반시설본부 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8621	/전송	02-3708-8659	/	buckgolje@seoul.go.kr	/	대시민공개