문서번호	공원운영과-19432
결재일자	2014.11.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	공원운영과장	서부공원녹지사업소장
이정훈	박미성	조준수	11/18 안해칠
협 조

근로자 대기실 지붕

정비공사 시행 계획

2014.  11.

서부공원녹지사업소

[ 공 원 운 영 과 ]

근로자 대기실 지붕 정비공사 시행 계획

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

월드컵공원 근로자 대기실 정비계획의 일환으로 평화의공원 테니스장 옆 대기실 지붕 정비공사를 다음과 같이 시행하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

❍ 월드컵공원 근로자 대기실 정비계획(공원운영과-10319호, 2014. 6. 19.)

Ⅱ		공 사 개 요

❍ 위    치 : 평화의공원 테니스장 옆 대기실, 난지순환길 퇴비장 주변

❍ 공사내용

- 평화의공원 테니스장 옆 대기실 : 컨테이너 6동 지붕 정비(방수, 케노피)

※ 평화의공원 홍제천변과 난지천공원 잔디광장 북측 대기실은 누수가 없고 상태가 양호하며, 일부는 아스팔트싱글로 마감되어 있어 정비대상에서 제외

- 난지순환길 퇴비장 주변 : 메쉬휀스(출입문) 설치 1개소

❍ 공사기간 : 착공일로부터 25일간

❍ 소요예산 : 20백만원

- 예산과목 : 세계적인 환경ㆍ생태 테마공원 육성, 산하공원 운영, 월드컵공원 시설물 보수정비, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅲ		시 행 방 법

❍ 계약방법 : 수의계약(소액)

❍ 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(안전행정부 예규 제103호, 2014. 7. 31.)

❍ 수의계약사유 : 추정가격이 2천만원 이하의 소액으로 수의계약 대상임

Ⅳ		추 진 일 정

❍ 2014. 11. 25. : 공사 발주 및 계약

❍ 2014. 12. 30. : 공사 시행 및 준공

붙임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.