문서번호	시설개선과-8941
결재일자	2014.11.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설개선과장	체육시설관리사업소장
이호연	이영교	신동호	11/19 代김남대
협 조

효창운동장 인조잔디 교체공사 추진계획

2014. 11

효창운동장 인조잔디 교체공사 추진계획

각종 축구대회와 체육행사가 열리고 있는 효창운동장 인조잔디 이용횟수 증가와 기간이 오래되어 잔디 상태가 심각하게 훼손되어 불편하므로 이를 교체하여 경기장 운영을 원활히 하고 시민들에게 양질의 체육시설 서비스를 제공하고자 함.

		추진근거

❍ 2014~2018 중기지방재정계획(지방재정법 제33조 관련)

		시설현황

❍ 위    치 : 서울시 용산구 효창원길 84-2 (효창동 3번지)

❍ 시설규모

운영	인조잔디 조성현황		시설규모
	시기 및 정비내역	사업비	경기장(㎡)	총면적(㎡)	좌석수(석)	수용인원
민간위탁 (서울시축구협회)	2008. 12월 준공 잔디 및 트랙교체	973,000천원	16,068	3,224	15,194	18,000

※ 인조잔디구장 면적 : 9,600㎡

※ 2009. 7. 1. ~ 현재  서울특별시축구협회에 민간위탁

❍ 이용실태 : 각종 아마추어 축구대회(년 648회) 및 체육행사 이용

		공사계획

❍ 소요예산 : 800백만원

- 인조잔디 교체 : 9,600㎡ * 70,000원/㎡당 = 672백만

- 기존잔디 철거공사 : 30백만

- 폐기물 처리비 : 80백만

- 기타 제경비 등 : 18백만

❍ 예산과목 : 효창운동장시설개보수(효창운동장 인조잔디 교체공사)

❍ 계약방법 : 철거공사(수의계약), 인조잔디 물품구매(조달구매)

		향후계획

❍ 인조잔디 조달 납품업체 선정요청 : 2015. 1월

❍ 납품업체 선정 및 계약 : 2015. 2월

❍ 기존잔디 철거공사 및 교체공사 시행 : 2015. 3월