문서번호	방재시설부-11880
결재일자	2014.11.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		정일환	11/19 임춘근
협조
	주무관		강종희

「경의선숲길 공원조성공사』

연남동 교차로 관련 민원사항 실정보고 검토

2014. 11

도시기반시설본부

방재시설부

『경의선숲길 공원조성공사』

연남동 교차로 관련 민원사항 실정보고 검토

「경의선숲길 공원조성공사」연남동 교차로  회전반경 개선요구 민원에

대한 실정보고 검토 보고임.

▶ 관련근거 : 경의경춘(감) 제2014–787(2014.11.17.)호

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경의선숲길 공원조성공사(2단계)

○ 위    치 : 용산문화체육센터 ~ 가좌역

○ 규    모 : 공원조성 84,268㎡, L=3.48km

○ 사업기간 : 2013.9 ~ 2016.3

○ 공 사 비 : 11,812백만원

Ⅱ

검토내용

○ 민원현황

- 민원인 : 마포구 연남동 연남파출소 인접 주민(3인)

- 민원내용 :교차로(동교로)에서 연남동파출소 앞 이면도로로 진입시             중·대형차량의 회전반경이 커서 진입이 어려우므로 개선요구

○ 조사결과

- 감리단 및 시공사 현장 합동조사 결과 본 교차로에서 이면도로로 우회전시 설계 회전반경 R3000으로, 공사가 완료 될 경우 소형차량은 진입이 크게 어렵지 않으나 중·대형차량의 경우 진입이 원활하지 못하여 교통흐름에 영향이 우려됨.

우회전 진입 동선(회전반경 R3000)	진입 회전반경으로 인한 주차차량 간섭

○ 처리 방안(개선안)

- 현장 조사 결과를 바탕으로 설계사(동심원)와 협의한 결과 회전반경을 R3000 -> R5000으로 조정하여 중·대형차량이 이면도로로 원활하게 진입될 수 있도록 조정하여 인접 주민의 교통편의를 도모하는 것이 적정한 것으로 판단됨.

당 초 (회전반경 R3000)	변 경 (회전반경 R5000)

Ⅲ

감리단 검토의견

○『경의선숲길 공원조성공사』연남동 교차로(동교로) 민원에 대하여 검토한 결과 민원내용이 적절한 것으로 판단되므로 본 교차로에서 이면도로로 진입하는 회전반경을 개선하여 인접 주민의 교통편의를 도모하는 것이 적정한 것으로 판단되며

○ 교차로 시공변경에 따른 설계변경은 공사의 시급성을 고려하여 우선 시행 후 정산 보고코자 함.

Ⅳ

검토결과

○ 상기 내용을 검토한 결과 『경의선숲길 공원조성공사』연남동 교차로(동교로) 회전반경 개선에 대한 감리단의 검토의견이 타당하다고 판단

되어 승인 통보코자 하며,

○ 교차로 시공변경에 따른 공사비 변경사항은 공사 시행 후 제출 받아 설계변경 시 반영코자 함.

붙 임 : 감리단 실정보고서 1부.  끝.