문서번호	도시철도설비부-10631
결재일자	2014.11.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신호과장	도시철도설비부장
김한수		김영하	11/19 정찬웅
협 조
	송변전과장			김형기
	시설전기과장			서태창
	차량과장			황영일
	설비계획과장			강재천
	설비공사과장			윤승범
	정보통신과장			이용기

	우이~신설 경량전철 민간투자사업(시스템공구)
	공기연장 공정표 검토회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

	우이~신설 경량전철 민간투자사업(시스템공구)
	공기연장 공정표 검토회의 결과 보고

사업시행자가 제출한 26.5개월 공기연장 공정표에 대하여 시스템분야 공정 적정성 검토 회의를 실시하고 결과를 보고 드림

□ 관련근거

○ 2014. 11. 7. 공정표 공문 제출(사업시행자→서울시)

※ 도시철도사업부 및 토목,건축,설비부로 동시 제출

□ 개요

○ 일  시 : 2014. 11. 17.(월) 16:00~17:00

○ 장  소 : 도시철도설비부 회의실(4층)

○ 안  건 : 26.5개월 공기연장 시스템공구 공정표 적정성 검토

○ 참석자 : 13명

- 본부(4명), 시스템감리단(3명), SPC(3명), 건설단(1명), 시공사(2명)

□ 회의내용

	감리단 및 서울시 의견	건설단 및 사업시행자 답변
문제점	· 주요 공정이 시공가능한 일정으로 연계되지 않음 · 궤도설치, 변전실 수전 및 기능실 급전, 연동시험, 열차 시운전 등 절차 모순	· 절대공기(`16.11.30) 충족을 위한 불가피한 결과임
결과	· 시스템공정 수행이 불가능할 것으로 판단, 수용불가 의견	· 본 공정표는 자금조달계획과 연계되어 변경 불가한 입장

□ 향후계획

○ 사업시행자에게 시스템분야 공정표 수용불가 및 주요공정(절차) 수정 요구(시운전기간 당초 14개월 고려)

○ 우리본부 관련부서로 회의결과 알림

붙임 : 1. 참석자 서명부 1부.

2. 시스템분야 연장공정표 1부.  끝.