문서번호	정수과-4795
결재일자	2014.11.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김진수		정종기	11/19 代유영준
협조
	주무관		이금재

하반기 정수시설물 청소 진행 사항 보고

2014. 11 .

뚝도아리수정수센터

정 수 과

하반기 정수시설물 청소 진행 사항 보고

『2014년 정수시설물 청소 및 준설』 감독 업무 수행에 따른 하반기 진행 사항에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

정수시설물 청소 및 준설 발주 현황

○ 업 체 명 : ㈜ 와이씨산업개발 (대표 : 박남재)

○ 계약기간 : ’14. 3. 19 ~ 12. 31

○ 계약금액 : 65,118,537천원

시설명	계열	지별	청소 주기	청소날짜	비고
정수지	1계열	1지	년 1회		●1정수지 내부방식공사 및 시운전 관계로 인한 청소 미실시
		2지
	2계열
	3계열
응집 및 침 전 지	2계열	1지	년 2회		● 시설현대화 공사와 관련 하반기 원인자 청소 실시
		2지
		3지
		4지
		5지
		6지
	3계열	1지	년 2회	9. 16
		2지		10. 6
		3지		10. 2
		4지		9. 30
		5지		9. 25
		6지		9. 22
회수조		1지	년 4회	9. 17	● 슬러지 누적시 수시 청소
		2지		9. 17
제2 배수정			년 1회	9. 26
배슬러지			년 1회	8. 12
여과지	3계열			9. 19 9. 24

추진사항

진행사항 보고

○ 현재 2,3계열 정수지외 기존 시설물에 대한 청소는 완료하였으며,

○ 2,3계열 정수지 청소는 1계열 정수지가 정상 생산되어야 2,3계열에 대하여 한 계열씩 비우고 청소가 가능한 실정인바,

○ 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사 감리단 및 본부 고도정수반에 1계열 정수지 내부방식공사와 관련 2,3계열 정수지 청소 가능일에 대하여 통보 요청(정수과-3442 ‘14. 9. 12)하였음.

○ 통보(뚝도(CM)2014-409 ‘14. 11. 7)된 사항은 2계열 여과지 시운전 중으로 2계열의 연속부하 시운전 일정에 맞추어 1계열 정수지를 사용하여 정수생산 가능한 ‘14년 12월 중 가능함을 통보함.

향후계획

○ 2,3계열 정수지 청소는 1계열 정수지로 생산 가능한 시기에 맞춰 청소코자합니다. 끝