투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(영동5교외 4개시설물 정밀점검 및 숯내교하자점검용역) 시행

1. 우리사업소에서 시행중인 『영동5교외 4개시설물 정밀점검 및 숯내교하자점검용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 영동5교외 4개 시설물 정밀점검 및 숯내교하자점검용역

나. 공사기간 : 2014. 05. 26 ~ 2014. 11. 21

다. 용 역 사 : ㈜삼림엔지니어링 대표 김 인 석

라. 변경사유 : 교량점검차 공종 미적용에 따른 감액사유 발생

마. 변경내역                                            (단위 : 원)

구 분		금 액		증 ․ 감	비 고
		당 초	변 경
총용역비		116,450,000	113,707,000	감) 2,743,000
도급비	공급가액	105,863,637	103,370,000	감) 2,493,637
	부가가치세	10,586,363	10,337,000	감) 249,363
	계	116,450,000	113,707,000	감) 2,743,000
이 전 비		-	-	-

바. 예산과목

- 도로시설과, 교량관리, 교량시설물 운영, 도로시설물(교량)안전점검 및 진단, 시설비(감2,743,000원)

붙 임   1. 설계변경 검토보고 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.

주무관	이민호		시설보수과장	代김호규		동부도로사업소장	11/19 송상영
협조자	주무관	이민호		계약1팀장	김점선
시행	시설보수과-4412	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 대치동 서울 강남구 남부순환로 3142(대치동 2번지)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0341	/전송	02-2040-0307	/		/	대시민공개