문서번호	방재시설부-11936
결재일자	2014.11.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		★방재시설과장	방재시설부장
김상용		서관석	11/19 임춘근
협 조
	조경시설과장			신용우
	주무관			임성은

마곡지구내 재생수공급시설 설치공사

설계변경(전체7회) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

도시기반시설본부

(방재시설부)

마곡지구내 재생수공급시설 설치공사

설계변경(전체7회) 검토보고

“마곡지구내 재생수공급시설 설치공사”와 관련하여 조경수목 추가식재 실정보고 승인사항 반영에 따른 설계변경(전체7회) 검토 보고임.

관련근거

○ 도화(감리)2014-11935호(‘14.11.17) : 전체7회 설계변경도서 제출

공사개요

○ 공 사 명 : 『마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사』

○ 공사규모 : 재생수공급 20,000톤/일

○ 공사기간 : 2011. 11. 01 ~ 2016. 07. 31

○ 사 업 비 : 금6,803,140천원

○ 시 공 사 : 유호산업개발(주)

○ 감 리 사 : (주)도화엔지니어링 외1

설계변경

[전체7회]

○ 변경사유 : 조경수목 추가식재 실정보고 승인사항 반영

○ 주요 변경내용

공 종	설계 변경 주요내용	공 사 비 (백만원)	비 고
조 경	1) 조경수목 보강 기조성된 수목이 빈약하고 주변숲과 부조화로 추가 식재 ・교목 : 느티나무외 14종 407주 ・관목 : 조팝나무외 9종 7,507주 ・초화류 : 맥문동외 1종 5,820본 ・지피류 : 잔디 500㎡	증 250	방재시설부-10831 (2014.10.28)
물가변동	1식	1
도 급 비		증 251	부가세 포함

◦ 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
전체공사 (7회변경)	직접공사비	4,420,267,004	4,602,243,214	181,976,210
	제 경 비	2,382,872,996	2,451,796,786	-68,923,790
	도 급 액	6,803,140,000	7,054,040,000	250,900,000

검토 및 조치계획

○ 감리단으로부터 제출된 설계변경도서를 검토한 바, 조경수목 추가식재 실정보고 승인사항을 반영한 사항으로,

○ 책임감리원의 검토의견이 적절하다고 판단됨으로 감리단 보고내용과 같이 설계변경(전체7회)을 시행하고 4차공사에 반영코자 함.

붙임 : 1) 책임감리원 검토의견서 1부.

2) 변경내역서(전체7회) 1부. 끝.