문서번호	재무회계과-15011
결재일자	2014.11.19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		재무회계과장	요금관리부장
이연창		박병만	11/19 이종욱
협조
	주무관		허준행

2014년 설계심사 집행 이행실태

순회점검 결과보고(북부수도사업소)

2014. 11.

요금관리부

(재무회계과)

설계심사 집행 이행실태 순회점검 결과보고

□ 기 관 명 : 북부수도사업소

○ 점 검 자 : 재무회계과장 외 5명

○ 점검기간 : 2014. 11. 17. ~  11. 18.

- 현    황

구분	계		공 사		용 역		물 품
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
건/천원	88	14,225,408	25	10,323,400	18	2,764,688	45	1,137,320

- 설계심사 이행, 제비율 검증확인 적용 현황

구분	설계심사 이행		제비율 검증 확인(설계 변경시)		비고
	이행	미이행	실시	미실시
건수	16		4

- 점검 지적사항

구분	계		환수 조치		정산 조치		직원 교육
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
건/천원	8	12,623	5	7,222	2	5,401	1	-

- 세부내용(토목)

연번	건 명	공사금액 (공사기간)	지적내용	조치계획	비 고
1	2014년 강북구 관내 시설물 및 소화전공사 (장기계속)	423,949천원 (2014.05.27. ~ 2014.12.31)	○ 폐기물처리비 정산 부적정 ▸콘크리트 파쇄물운반 및 폐기물 기계상차 2㎥ 과다적용	추후 정산시 감액 조치할 것 (99천원)
2	2013년 노원구 관내 상수도공사 2차 (장기계속)	360,987천원 (2014.01.08. ~ 2014.06.30.)	○ 퇴직공제부금비 과다 정산 ▸3,567천원 → 756천원	환수 (3,883천원)

- 세부내용(토목)

연번	건 명	공사금액 (공사기간)	지적내용	조치계획	비 고
3	2013년 미아동외 4개동 상수도공사(장기계속)	259,754천원 (2013.07.15. ~ 2014.06.30)	○ 대형계량기실 사급자재비 중복 정산 ▸75mm 3조 중복	환수 (2,639천원)
4	2014년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사 (장기계속)	1,846,577천원 (2014.07.01. ~ 2015.06.30)	○ 환경보전비 정산 부적정 ▸중복 정산 ○ 환토재 과다 정산 ▸303㎥ → 146㎥	추후 정산시 감액 조치할 것 (5,302천원)
5	4.19묘지삼거리~4.19 배수지간 세척갱생관 정비공사	145,123천원 (2014.04.25. ~ 2014.10.13)	○ 밸브설치공 정산 부적정 ▸부단수분기공에 밸브설치 포함	환수 (110천원)
6	2013년 수유1동외 8개동 상수도공사 (장기계속)	443,024천원 (2013.06.03. ~ 2014.06.30)	○ 작업차량비(직결급수전환) 과다 정산 ▸111개소 → 72개소	환수 (432천원)

- 세부내용(기계•전기)

연번	건 명	공사금액 (공사기간)	지적내용	조치계획	비 고
7	2013년 전기설비 유지보수공사(장기계속)	43,796천원 (2013.06.17. ~ 2014.03.31.)	○ 일반관리비 및 이윤 과다 지급 ▸ 일반관리비 : 6.0% → 6.13% ▸ 이윤 : 15.0% → 15.4%	환수 (158천원)
8	급수운영과 사무실 칸막이 설치공사	8,919천원 (2014.07.14. ~ 2014.07.23.)	○ 전선관 설치비 부적정 ▸난연CD전선관 설치비(내선전공) : 0.04인 → 0.05인 ※ 가요전선관(CD)은 합성수지 전선관 품의 80% 적용. (전기품셈 5-1, 전선관 배관)	직원 교육

○ 개선사례 및 사업소 의견

- 의견없음.  끝.