문서번호	교량보수과-3555
결재일자	2014.11.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	성동도로사업소장
김근섭		박춘배	11/19 정진오
협 조

신내1교 외 1개 시설물 정밀점검 용역 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  11

성동도로사업소

(교량보수과)

신내1교 외 1개 시설물 정밀점검 용역 결과 보고

시설물의 안전관리에 관한 특별법에 의거 시행중인 “신내1교 외 1개 시설물(신내2교) 정밀점검용역” 결과를 보고 드림

□ 용역개요

○ 시설물명 : 신내1교, 신내2교

시 설 명	위 치	규 모	준공년도	비고
신내1교	중랑구 신내동	폭(B)=30.4m, 연장(L)=29.9m	1993.06
신내2교	중랑구 신내1동	폭(B)=26.4m, 연장(L)=40.0m	1993.05

○ 용역내역

- 용역기간 : 2014.05.22. ~ 2014.11.17. (180일간)

- 도 급 액 : 29,038,890원

- 도 급 사 : ㈜케이엠빌더스토건 대표이사 전선미

- 사업책임기술자 : 박시준

□ 추진경위

○ 2014. 5. 15 : 계약체결

○ 2014. 5. 28 : 용역사, 발주처 합동 사전점검 실시

○ 2014. 6. 12 : 착수보고회 실시

○ 2014. 7. 25 : 용역사 사업책임기술자 등 참여기술자 간담회 실시

○ 2014. 10.02 : 용역사, 발주처 합동점검 실시

○ 2014. 10.20 : 최종보고 및 외부전문가 자문 실시

○ 2014. 11.17 : 준공계 제출

□ 용역결과 주요 내용

시설명	상태평가 (결함도점수)	보수보강비 (천원)	주요 결함내용	비고
신내1교	B (0.208)	소계 54,326	∘ 교면포장 아스콘 망상균열 15.0㎡ 토공부 포장 파손 23.6㎡ ∘ 방호울타리/중앙분리대 균열(0.3mm이상) 13.0m, 표면열화 39.0㎡, 철근노출 10.04㎡, 들뜸, 박락, 파손 0.61㎡ ∘ 후타재 균열 10.9m, 유간 토사퇴적 12.0m, 후타재 마모, 파손 24.19㎡, 차수조인트파손, 미설치 2EA, 신축이음하면 누수 60.0m, 신축이음하면 열화, 철근노출 0.3㎡ ∘ 바닥판하면 보수재박리, 들뜸, 열화 7.1㎡, 재료분리 0.3㎡ ∘ 거더/가로보 균열(0.3mm이상) 1.2m, 재료분리, 들뜸, 파손, 열화 6.57㎡, 철근(강재)노출 0.39㎡, 백태, 누수흔적 4.8㎡ ∘ 유도배수관 탈락 30m, ∘ 받침장치 무수축 몰탈균열 1.1m, 파손 0.1㎡, 받침장치 흉벽밀착 2EA, 받침부식 10EA ∘ 하부구조 균열(0.2mm이하) 7.5m, 보수재박리, 박락 7.0㎡, 들뜸, 재료분리 0.75㎡, 철근노출 0.02㎡, 누수흔적, 백태 23.0㎡ ∘ 기타 부대시설 점검통로 덮개 탈락 1EA
		개략공사비 54,326
신내2교	B (0.237)	소계 49,060	∘ 교면포장 아스콘균열 27.0m, 포트홀, 파손 0.26㎡, 토공부 파손 20.85㎡ ∘ 방호울타리/중앙분리대 균열(0.3mm이상) 4.0m, 표면열화 39.0㎡, 보수부들뜸 1.46㎡, 망상균열 40.0㎡ ∘ 신축이음본체 고무재파손 44EA, 후타재 균열 17.7m, 유간 토사퇴적 8.0m, 후타재 마모, 파손 2.22㎡, 신축이음하면 열화, 백태 18.15㎡ ∘ 바닥판하면 균열(0.2mm이하) 7.0m, 망상균열 49.6㎡, 보수재 박리, 들뜸, 열화 10.14㎡, 백태 47.37㎡, 철근노출 1.1㎡ ∘ 바닥판상면 열화, 박락 60.0㎡ ∘ 거더/가로보 균열(0.2mm이하) 179.2m, 균열(0.3mm이상) 38.2m, 망상균열 18.08㎡, 백태, 열화 1.0㎡ ∘ 배수시설 배수관 부식 8EA ∘ 받침장치 무수축 몰탈균열 4.3m, 파손 0.12㎡, 볼트변형, 풀림 8EA, 받침부식 2EA ∘ 하부구조 누수흔적 50.4㎡, 백태 0.31㎡, 보수재 들뜸 1.0㎡
		개략공사비 49,060
		하자보수 완료 (2014.10.29.)

□ 조치계획

○ 2014 자동차전용도로 도로시설물 일상유지보수공사로 보수 완료

- 신내1교 : 신축이음부 하부유도배수재 설치 80m, 교대 오염부 표면보수                    (그라인딩후, 시멘트 풀칠) 209㎡

- 신내2교 : 교대부 단면복구 5㎡, 유도배수재 설치50m, 후타재 보수 1.5m

점검계단 설치 1식

○ 잔여 보수물량에 대하여는 2015년 자동차전용도로 도로시설물 일상유지보수        공사로 보수 시행

첨부  시설물별 정밀점검 결과 요약문 2부.   끝.