투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(교통운영과장)
(경유)
제 목	2014년 교통사고 잦은곳 개선사업 교통신호기 공사 부족예산 추가 배정 요청(양평동교차로)

1. 교통운영과-16228(2014.08.29.)호 『2014년 교통사고 잦은 곳 개선사업 공사시행 요청 및 예산 재배정(양평동교차로)』과 관련입니다.

2. 위 호 관련하여 기 재배정 받은 금액대비 시공현장 여건 변화에 따른 공사비가 부족하여 사업추진에 차질이 예상되는 바 추가예산(요청금액 금3,500,000원)을 요청하오니 검토 후 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 2014년 교통사고 잦은곳 개선사업 교통신호기 공사                                     부족예산 추가 배정 요청(양평동교차로)

나. 기 예산 재배정 내역                                  (단위:원)

예산과목	기 재배정액	부족예산 추가 배정 요청 금액	비고
도시교통본부 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리강화, 교통사고 잦은곳 개선, 시설비	17,170,000	3,500,000

나. 부족예산 추가 배정 요청금액 : 금3,500,000원.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
★주무관	양상규		기전과장	11/19 代한영호
협조자
시행	기전과-14412	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천로237(마곡동 67-1)	/
전화	2657-7969	/전송	2657-7939	/	ysg007@seoul.go.kr	/	대시민공개