투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	관급자재(아스팔트콘크리트) 수량변경 요청_ 2014년 노후포장도로 정비공사 A구역 관급자재구매

우리사업소에서 시행중인 「2014년 노후포장도로 정비공사(A구역)」에 사용되는 관급자재(아스팔트콘크리트)에 대하여 아래와 같이 물량변경을 요청하오니

조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 아스팔트콘크리트(2014년 노후포장도로 정비공사A구역)관급자재 구매-남부

나. 계약기간 : 2014. 5. 23 ~ 2015. 2. 28.

다. 계 약 자 : 인성에이앤티(주)  대표 이상우

라. 변경내역

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
수량 (톤)	일반	18,371	18,825	증 454
	개질	455	455	-
구 매 액(원)		1,508,898,370	1,545,121,750	증 36,223,380

마. 변경사유 : 실 공사물량 증․감에 따른 관급자재 물량 변경

바. 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비및부대비, 시설비

붙임 1. 변경내역서(2차) 1부.

2. 물량변경 사유서 1부.  끝.

	도로보수과장
주무관	조경현		도로보수과장	11/19 代정규용
협조자
시행	도로보수과-6354	(		)	접수		(		)
우	150-073	서울 영등포구 대림3동 도림로 145	/	www.seoul.go.kr
전화	3284-5451	/전송	842-1634	/		/	대시민공개