문서번호	도로보수과-10395
결재일자	2014.11.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
최정필		이규철	11/19 김만수
협조
	주무관		이상하

2014년 노후포장도로 정비공사-서부 낙찰차액(도급비·관급비) 사용계획 보고

2014.11.

2014년 노후포장도로 정비공사-서부 낙찰차액(도급비·관급비) 사용계획 보고

우리사업소에서 시행중인 『2014년 노후포장도로 정비공사-서부』 시행중

포장상태가 노후되어 정비가 필요한 구간에 대하여 낙찰차액을 사용하여

연내 정비를 완료하고 특별시도 유지관리에 만전을 기하고자 함

공사개요

ㅇ 공 사 명 :「2014년 노후포장도로 정비공사 - 서부」

ㅇ 사업규모 : 절삭후 아스팔트 덧씌우기 1,556a

ㅇ 공사기간 : 2014. 5. 19 ~ 12. 31

ㅇ 계약업체 : (주)테크원이앤씨 대표 최호남

ㅇ 공 사 비 : 4,520,504,500원

(도급비 1,089,119,500원, 관급비 2,884,385,000원, 이전비 547,000,000원)

낙찰차액 현황

(단위 : 원)

구 분	설계금액 (a)	계약금액 (b)	낙찰차액 (a-b)	비 고
계			307,754
도 급 비	1,007,410	872,579	134,830
관 급 비 (1등급,개질)	1,401,902	1,228,977	172,924

예산집행 현황(‘14.11.20일 현재)

(단위:천원)

구 분	예산액 (A)	원인행위 금 액 (B)	추가 필요액 (C)	집행잔액 (A-(B+C))	비 고
계	5,097,686			312,396
도 급 비	4,301,041	1,223,920	214,030	578,976
관 급 비 (이설비)		2,161,544	556,472
노면표시	438,664	412,726	229,499	-204,561
폐기물처리	357,981	357,255	62,745	-62,019

※ 예산액은 낙찰차액 제외금액임

※ 예산 세부사업 : 노후포장도로정비공사(도로굴착복구기금 확보예산 1,050백만원 제외)

노후포장도로 정비구간 추가(3개 구간 추가, 248.5a)

ㅇ 노선변경 ┏ 당 초 : 20개 노선 38개 구간

┗ 변 경 : 20개 노선 41개 구간(3개 구간, 248.5a 추가)

ㅇ 추가노선 정비개요

- 노선현황(3개 구간, 248.5a 추가)

연번	노선명	위 치	규 모	정비차로	자재종류	비고
1	월드컵로 (난지도길)	구룡사거리~ 월드컵경기장사거리	B=7.5m, L=2,000m A=150a	1,2,3차로 (상행)	wc-3, 1등급,5㎝
2	〃	마포구청역4번출구앞	B=20m, L=90m A=18a	전폭	wc-3, 1등급,5㎝
3	수색로	수색역~증산교	B=7.5, L=1,150m A=80.8a	1,2,3차로(상행)	wc-3, 1등급,5㎝

- 개략 소요예산 : 488,508천원

· 도급비 및 관급비 : 401,266천원

· 노면표시 : 55,888천원(시공비:23,692천원, 관급비:32,196천원)

· 폐기물처리비 : 31,354천원

- 공사기간 : ‘14. 11. 19 ~ 11. 25

문 제 점

ㅇ 추가 노선 정비(488,508천원)를 위해서는 집행잔액(312,396천원)이 부족하여 부득히 낙찰차액  사용이 필요한 실정임

조치계획

ㅇ 도로 균열, 포트홀, 침하 등으로 동절기 전 보수가 필요한 상기 추가노선 정비에 대하여 「2014년 노후포장도로 정비공사-서부」의  집행잔액 및 낙찰차액(합계 : 620,150천원) 범위내에서 활용하여 우선 2014년 11월중 정비를 완료하고, 추후 설계변경 정산 처리

하고자 함

붙임 : 추가노선 정비 설계내역서 1부.  끝.