문서번호	건축부-13878
결재일자	2014.11.20.
공개여부	부분공개
방침번호

					시 민
주무관	의료시설과장	건축부장	시설국장		도시기반시설본부장
정재흥	양기정	김우성	이광세		11/20 천석현
협 조
	경리과장			허금도
	기획예산과장			최갑영

「아동․청소년 예술교육센터 설치공사 설계공모」 작품접수 결과 및 심사계획 보고

2014. 11.

도시기반시설본부

(건 축 부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	대학교수, 건축사	)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 ■ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 ■ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 ■ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

「아동․청소년 예술교육센터 설치공사 설계공모」 작품접수 결과 및 심사계획 보고

아동․청소년 예술교육센터 설치공사 설계용역자 선정을 위한 설계공모 작품접수 결과 및 작품심사 계획(안)을 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ		사업개요

○	대지위치	:	서울시 양천구 신월동 267번지외(서서울호수공원내 김포가압장)
○	건립규모 : 지하1/지상1, 연면적 3,360㎡(리모델링 및 증축) -기존 사무실, 배전반실, 배관실을 연구실 및 운영사무실 공간으로 리모델링 -기존 크레인실을 중층으로 구획(※사실상 증축) -기존 수조공간을 공연공간 및 썬큰가든 공간으로 조성
○	지역지구	:	자연녹지지역, 대공방어협조구역, 학교환경위생 정화구역
○	주용도	:	상수도가압장→교육연구시설로 변경
○	사업비	:	29.1억원
	- 예정공사비		2,717,000천원(부가세 포함)
	- 설 계 비		97,159천원(부가세 포함)
○	사업기간	:	2014. 07. ~ 2015. 12.
○	설계기간	:	계약일로부터 5개월
○	추진경위	:

- 2014.07.22.       아동․청소년 예술교육센터 조성․운영계획(행정1부시장)

- 2014.07.23.       설계 및 발주의뢰(문화정책과→건축부)

- 2014.09.23.       아동․청소년 예술교육센터 설치공사 설계용역 공모 공고

- 2014.09.29. ~ 30. 응모접수(37개사 응모)

- 2014.10.02. ~ 08. 질의 접수 및 응답

- 2014.11.14.        작품 접수(12개사 제출)

- 2014.11.21.        작품심사 예정

Ⅱ		작품 접수 결과

○ 접수기간 : 2014.11.14.(금) 09:00 ~ 17:00

○ 접수장소 : 도시기반시설본부 건축부

○ 접수결과 : ㈜디아건축사사무소 외 11개사 접수

○ 업체명단 : 별첨 작품접수대장 참조

Ⅲ		설계공모 작품심사 계획

1) 심사위원 명단

○ 심사위원선정위원회를 통해 기 구성[건축부-11169호(2014.09.18.)]

구분	성 명	구분	성 명
1	송규만(홍익대학교)	6	김정곤(공공건축가)
2	김호정(단국대학교)	7	김홍남(서울문화재단예술지원본부장)
3	김성홍(서울시립대학교)	예비1	김종규(한국예술종합학교)
4	이소진(아뜰리에 리옹 서울)	예비2	조성익(TRU 건축)
5	박태홍[(주)토문 엔지니어링]

※ 심사위원의 제척·기피·회피 등에 의한 결원 발생시 예비심사위원 상위 순번 순으로 충원

2) 심사계획

○ 심 사 일 : 2014.11.21.(금) 13:00 ~ 19:00(6시간)

○ 심사장소 : 서소문별관 2동 3층 대회의실

○ 심사일정(안)

0.	심사위원회 개최준비(도서 사전 검토 등) 13 : 00
1.	심사위원회 개회 선언 14 : 00
2.	심사위원소개 및 사업설명 14 : 10
3.	심사위원장 및 심사방법 결정 14 : 45
4.	설계자 사전설명 15 : 00
5.	심사도서 검토 및 채점 17 : 30
6.	감점사항 보고 및 점수 집계 17 : 45
7.	당선작 발표 18 : 30
8.	평가서 작성 18 : 45
9.	심사종료 19 : 00

3) 작품평가 계획

○ 평가기준 : 심사방법, 평가항목, 배점, 기타 심사를 위해 필요한 사항은 아래기준을 고려하여 심사위원회에서 정한 바에 따름

- 아동․청소년 예술교육센터 설치공사 설계공모지침서 제5장

- 건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2014-345호, 2014.06.12.)

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제42조의4

- 지방자치단체 설계공모 운영요령(행정안전부예규 제361호, 2011.06.01.)

○ 설계공모 참가자 작품 설명

- 발표순서 : 2014.11.17. 14:00 공모참가자 입회하에 추첨을 통해 결정

- 설명방법 : 설명대상자 선정, 질의응답 여부, 평가 방법은 심사위원회 결정에 따름

○ 평가방법 :

- 공모지침상의 배점기준을 기준으로 채점제 방식을 원칙으로 하나, 심사위원회 의결 시 투표제 방식 채용

- 투표제 방식 채용 시 배점기준, 평가항목, 감점사항을 반영하여 평가

○ 심사결과의 발표 및 공개 : 최우수작(당선작), 우수작(1), 가작(2)

- 서울시 인터넷 홈페이지 [http://infra.seoul.go.kr → 분야별정보 → 건설 →기반시설건설 →기반시설소통방 → 현장자료실]

Ⅳ		행정사항

1) 입상자 보상

○ 당선작 : 아동․청소년 예술교육센터 설치공사 설계용역 수의계약(계획, 중간 및 실시설계)

※ 발주기관의 사정으로 설계용역 계약 전 사업이 취소되는 경우 당해 용역비의 10% 범위내에서 응모작품수 및 제출도서를 고려하여 보상금을 지급

○ 입상작 : 우수작-380만원, 가작(1)–290만원, 가작(2)-190만원(부가세 포함)

※ 작품수준에 따라 심사위원회의 결정으로 보상대상작품(우수작 및 가작)을 선정하지 않을 수 있으며, 채점결과 동점인 경우는 해당 순위 간 보상금을 균등 지급

○ 예산과목 : 조직)문화정책과, 정책)문화도시 서울 구현, 단위)문화향유공간 및 문화기반시설 조성, 세부)어린이 창작공간 조성 편성목)시설비

2) 심사위원 수당지급

○ 위원 수당 : 185,000원 × 7인 = 1,295,000원

- 위원수당 산출근거 : 247,598원 × 6/8시간 = 185,000원(천단위 이하 절사)

※ 엔지니어링사업대가기준 특급기술자 247,598원

○ 예산과목 : 조직)문화정책과, 정책)문화도시 서울 구현, 단위)문화향유공간 및 문화기반시설 조성, 세부)어린이 창작공간 조성 편성목)시설부대비

3) 심사부대경비 지급

○ 상장제작 : 6,000원×4매 = 24,000원(부가세 포함)

○ 사무용품 및 다과비 : 300,000원(부가세 포함)

○ 예산과목 : 조직)문화정책과, 정책)문화도시 서울 구현, 단위)문화향유공간 및 문화기반시설 조성, 세부)어린이 창작공간 조성 편성목)시설부대비

4) 향후계획

○ 2014. 12.               설계용역 계약 및 착수

○ 2014. 12. ~ 2015. 04. 계획, 기본 및 실시설계

○ 2015. 04. ~ 2015. 05. 공사 발주 ․ 계약 ․ 착수

○ 2015. 12.               준공(예정)

붙 임  작품접수대장 1부.  끝.