투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	설계변경(전체7회) 계약 의뢰

1. 우리부에서 시행중인 『마곡지구내 재생수 공급시설설치공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(전체7회)으로 인한 변경계약을 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사

나. 도 급 비 : 전체 6,803백만원

다. 공사기간 :  전체 2011. 11. 01 ∼ 2016. 07. 31

라. 도 급 자 : 유호산업개발(주)

마. 예산과목 : 하수도사업특별회계, 도시안전실 물관리정책과, 물재생시설개선 및 관리, 물재생시설개선, 마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사, 시설비 및 부대비, 시설비

바. 설계변경 내역

[전체7회]

1) 변경내역

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
도 급 비	6,803,140	7,054,040	증 250,900
공사기간	2011. 11. 01 ∼ 2016. 07. 31	좌동	변경없음

2) 변경사유 : 수목 추가식재 실정보고 승인사항 반영

붙임 : 1) 설계변경 보고서 1부.

2) 책임감리원 검토의견서 1부.

3) 설계변경 내역서(전체7회) 1부. 끝.

	방재시설부장
주무관	김상용		방재시설과장	서관석		방재시설부장	11/20 임춘근
협조자	★주무관	임성은		조경시설과장	신용우		경리과장	허금도
시행	방재시설부-11964	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/
전화	02)3708-8782	/전송	02)3708-8756	/	kimsy2405@seoul.go.kr	/	대시민공개