문서번호	급수운영과-28761
결재일자	2014.11.20.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
최호림		김태형	11/20 안재엽
협 조

설계변경 심의 위원회 개최 결과보고

(2014년 광진구 관내 송배수관정비공사 등 건설폐기물처리용역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.11.

동부수도사업소

급수운영과

『2014년 광진구 관내 송배수관정비공사 등 건설폐기물처리용역』

설계변경 심의 위원회 개최 결과보고

우리 사업소에서 시행중인 『2014년 광진구 관내 송배수관정비공사 등 건설폐기물처리용역』 에 대한 설계변경 사전 심의 위원회를 개최하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ		용역현황

가. 용 역 명 : 2014년 광진구 관내 송배수관정비공사 등 건설폐기물처리용역

나. 용역기간 : 2014. 04. 23. ~ 2014. 11. 30.

다. 계약업체 : **************

라. 물량증감 내역

공 종	품 목	단위	당초수량	변경수량	비고(증․감)
폐기물 운반	폐아스콘	㎥	694	726	증) 32
	폐콘크리트	㎥	50	33	감) 17
	폐토석	㎥	30	-	감) 30
폐기물 처리	폐아스콘	ton	1,630	1,706	증) 76
	폐콘크리트	ton	115	76	감) 39
	폐토석	ton	51	-	감) 51

마. 용역금액 변경내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	비 고(증․감)
총 용역비	**********	**********	**********
공급가액	**********	**********	**********
부가세	*********	*********	**********

Ⅱ		심의위원회 개최사항

가. 개최일자 : 2014. 11. 20.(목) 10:30

나. 개최장소 : 3층 회의실

다. 참석위원 : 급수운영과장 외 6명

라. 검토내용

- 공사별 폐기물 물량 증․감에 따른 설계변경 적정성 검토

마. 검토결과 : 위 검토내용에 대하여 적정하다는 심의의견을 제시함.

Ⅲ		향후계획

가. 상기와 같이 설계변경 심의 위원회 개최결과 심의위원 모두 적정하다고 의견을         제시하였으므로, 이를 설계변경 내역에 반영하여 설계변경 시행 후 우리사업소        행정지원과에 변경계약 의뢰하고자 합니다.

붙임문서 : 1. 설계변경 심의 의뢰서 1부.

2. 심의위원회 의견서 1부.  끝.