문서번호	마곡조성담당관-6788
결재일자	2013.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	토목계획팀장	마곡조성담당관		마곡사업추진단장
이기원	서귀동	하종현		09/02 서노원
협 조

단지조성 공정점검(11차) 결과 보고

2013. 9.

마곡사업추진단

(마곡조성담당관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 ■	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	SH공사	)	무 □

단지조성 공정점검(11차) 결과보고

Ⅰ		점검개요

일   시 : ′13. 8. 30(금) 15:00~16:30

장   소 :  마곡 1공구 현장사무실

참 석 자 : 마곡조성담당관 (토목계획팀장, 담당)

SH공사 (토목조경팀 담당)

현장소장, 현장감리단장 (1▪2공구, 빗물펌프장)

안   건 : 단지조성 공정 진행상황 점검 및 추진대책

〔공정현황〕

○ 단지조성공사 : 공정률 41.9% ('13. 8월말 현재)

- 간선하수박스   : 1,115m중  1,075m 완료 (96.4%)

- 공동구(1공구)   : 1,158m중    810m 완료 (69.9%)

(2공구)  : 1,506m중  1,307m 완료 (86.8%)

○ 신설 빗물펌프장 : 공정률 16%

- 펌프장 구조물 : 펌프장 기초 버림콘크리트 타설 및 바닥 방수

- 토출암거 : 올림픽대로 지장물에 따른 BTR추진공 작업대기

Ⅱ		점검결과 및 조치

빗물펌프장 공사관련 제방 통과부분 전체에 대한 철저한 안전대책 수립 시행

- 제방안전대책 관련 전문가 자문회의 개최('13.9.12, SH공사)시 강관추진시 저촉된 지장물처리 대책뿐만 아니라, 제방하부 통과부분 전체구간에 대하여 완전한 제방안전이 확보되도록 방안 강구

- 제방상부 도로 관리부서(도시안전실, 서울시설공단)와 긴밀한 협조체계 구축

공항로 구조개선 공사관련 당초 예정대로 개통될 수 있도록 지하시설물 공정관리 및 사전협의 철저

- 동절기 포장공사로 하자가 발생되지 않도록 조속 추진