문서번호	조경과-4793
결재일자	2013.9.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	조경과장	관리부장		서울대공원장
오맹렬	김흔진	이성주	양현모		09/03 안영노
협 조
	총무과장			이경로

2013년 근교산(산림욕장) 등산로 정비공사 설계변경 검토보고

2012. 9.

서울대공원

(조경과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

2013년 근교산(산림욕장) 등산로 정비공사 설계변경 검토보고

2013.6.22부터 공사착공하여 시행중인□2013년 근교산(산림욕장) 등산로 정비공사□와 관련하여, 본공사 시공사부터 제출된 실정보고(설계변경)사항에 대하여 다음과 같이 검토 보고합니다.

Ⅰ		공사개요

공 사 명  : 2013년 근교산(산림욕장) 등산로 정비공사

○ 위    치  : 산림욕장 등산로(호주관입구 ~ 조절저수지)

○ 기    간 : 2013. 6. 21 ~ 9. 15

○ 공사내용 : 목교설치, 활생목 흙막이설치, 돌쌓기, 운동시설, 안내판설치 등

○ 공 사 비 : 169,318천원(도급비 146,403천원, 관급비 22,915천원)

○ 도 급 자 : (주)일산이엔지 대표 이인재

Ⅱ		주요 설계변경 사항

설계변경 사유 및 내역

호지별	변경사유	변경내용
시설물 공사	•등산로 주변 돌쌓기 공종은 현장여건에 맞추어 규격 및 물량 조정	-돌수로 : 44m → 51.5m -산돌쌓기 : 257m→32m -돌기슭막이 : 75㎡→39.6㎡
	•설계에 미반영된 노후(부패) 기존 흙막이는 모두 추가교체, 철거한 흙막이 방부목 중 재활용 가능한 목재는 일부구간에 재설치 등 현장여건에 맞게 물량 변경	-활생목흙막이(H=0.28m) :359→0M -활생목흙막이-1(H=0.28m):0→870M -활생목흙막이-2(H=0.15m):0→104M -방부목흙막이(H=0.32m) :0→285M -방부목 철거(흙막이) :150→247㎡

시설물 공사	•노후화되 위험성이 있는 기존목교 및 등산로 보행시 안전상 문제가 되는 곳에 한하여 목교를 설치하고 현장여건을 반영하여 규격 및 물량을 조정 시공 •조절저수지에서 맹수사샛길 가는길 등산로 계곡부가 우기시 등산객 고립 등 안전상 위험이 있으므로 목교 1개소 이동설치	-목교설치(L=1.5m):5→0개소 -목교설치(L=1.8m):1→0개소 -목교설치(L=2.7m):4→0개소 -목교설치(L=3.6m):8→0개소 -목교설치(L=6.0m):2→0개소 -목교설치(L=8.0m):1→0개소 -간이목교설치(L2.7*W1.8):0→1개소 -간이목교설치(L3.0*W1.8):0→3개소 -간이목교설치(L3.6*W1.5):0→1개소 -간이목교설치(V자형,L5.0*W1.5):0→1개소 -목교설치(L6.0*W1.5):0→1개소 -목교설치(V자형,L9.3*W1.5):0→1개소
	•조절저수지 등산로변 기존 정자가 노후화되어 안전상 위험이 있으므로 철거후 팔각정자로 교체 설치 •정자주변 의자설치 민원사항 반영에 따른 물량 증	-정자철거(H2400*D6000):0→1개소 -팔각정자(5500*5000):0→1개소 -평의자(1630*405) : 0→6개소
	•공원내 운동공간 재배치 및 운동시설보완계획에 따른 변경 (조경과-4558,2013.8.22)	-원주목경계(Ø100*H500):0→30M -잡석포설(H150):0→50㎥ -체육시설물이설:0→5개소
	•기존 로프휀스는 철거후 신규설치 토록한 것을 예산절감을 위하여 로프교체 및 보수 시공으로 변경 •안내판 재설치(기초)는 내역에서 제외(조달구매)	-방향표지판 재설치:9→0개소 -안전로프설치(H0.9*L2.0):89→0경간 -안전로프시종점부설치(H0.9*L2.0):8→0개 -휀스보수 및 로프교체A:0→115.5경간
관급 자재	•기존안내판 기둥에 방향표지판만 교체시 안전성 및 미관을 저해하므로 서울시 숲길 안내체계에 따라 기둥일체형으로 변경설치(조달구매)	-방향표지판(600*120, 날개) 20개→ 0개 -방향표지판(600*120*1500) 0개→ 14개 -방향표지판(750*500*1200) 0개→ 14개
	•본 공사 설계변경에 따른 물량증감	-목교바닥판재(T24*100) :32→0㎡ -목교바닥판재(T30*120) :69→62㎡ -온몸어께근육풀기 :0개→1개

세부 설계변경 내역(물량증감 등) : 따로붙임 참조

Ⅲ		설계변경에 따른 도급금액 변경

도급금액 변경내역

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	비 고
총공사비	169,318	183,582	증 14,264
도 급 액	146,403	146,403	변 경 없 음
관 급 비	22,915	37,179	증 14,264

관급비(안내판 조달구매 설치) 증액에 따른 소요예산 14,264천원은 본공사 낙찰차액을 사용하여 집행

예산과목

○ 푸른도시국 자연생태과, 생태계복원 및 야생동식물보호, 생태계보전사업,

근교산등산로정비, 시설비

Ⅳ		조치의견

현장여건 반영 및 추가 공사지 발생 등에 따른 설계변경으로 공사시행에 만전을 기하고자 하며, 등산로 안내표지판(일체형) 조달구매설치는 현장설치도로서 별도로 시공처리 코자 합니다.

붙 임 : 1. 설계변경 내역 1부.

2. 실정보고서. 1부.  끝.