함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	계약기간변경의뢰

1. 우리과에서 시행하고 있는 『도봉산역~도봉파크빌 아파트간 송배수관정비공사-1차』계약기간 변경사유가 발생하여 아래와 같이 계약 연기의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 도봉산역~도봉파크빌 아파트간 송배수관정비공사-1차

나. 계 약 자 : 주용종합건설(주)  대표 임병배

다. 계약기간(변경)

- 당초 : 2014.06.09.~2014.11.25

- 변경 : 2014.06.09.~2014.12.31

라. 귀책사유 : 북부수도사업소(지체상금 미부과)

따로붙임 : 1) 방침서 1부.

2) 합의서 1부.. 끝

	급수운영과장
주무관	문병희		급수운영과장	11/20 김수영
협조자
시행	급수운영과-21729	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3342	/전송	02-3146-3389	/	mbbhh0309@seoul.go.kr	/	대시민공개