문서번호	현장민원과-18099
결재일자	2014.11.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	강남수도사업소장
김생수		이수길	11/20 김광식
협 조
	급수운영과장			최임봉
	시설관리과장			송근호

『‘14년 노후 공용배관 교체 목표달성』을 위한

T/F팀 운영 결과보고서

2014. 11.

강남수도사업소

현장민원과

『‘14년 노후 공용배관 교체 목표달성』을 위한

T/F팀 운영 결과보고서

우리사업소 ‘14년 옥내 노후 급수관(세대, 공용) 교체목표를 초과달성코져 다음과 같이 T/F팀을 구성, 공용배관 중점추진한 결과를 보고합니다.

▢ ’14년 목표

○ 교체(갱생)가구 : 4,700가구 (공용 : 3,800, 새대 : 900가구)

○ 지  원  예  산 : 1,576백만원

▢ ’14년 10월말 기준 계획대비 실적

단위 : 가구수

구 분	계 획			실 적			계획대비실적율 (%)	예 산 소요액 (백만원)
	계	1월~10월	11월 ~12월	계	1월~10월	11월 ~12월
계	4,700	3,760	940	3,770	3,770		100.3	1,320
세대	900	720	180	1,584	1,584	-	220.0
공용	3,800	3,040	760	2,186	2,186	-	71.9

▢ ’14년 4분기중 잔월 계획

단위 : 가구수

구 분	계	기교체	4분기			비 고
			소계	11월	12월
계	4,700	3,770	930	540	390
세대	2,364	1,584	780	390	390
공용	2,336	2,186	150	150	-

▢ 문제점 및 대책

○ 상기 표와 같이 ‘14년 목표 4,700가구중 ’14년 10월말 계획대비 실적은        100.3%로 목표를 초과달성 하였으나

○ 면밀히 살펴보면 공용배관 교체실적이 계획에 대비 실적이 현저히 저조함을        원인 분석한바 일부 공동주택 단지의 공용배관 추진이 보류 또는 취소되었

으나 금년 목표를 달성키 위해서는 상기와 같이 ‘14년 잔월계획을 세대        배관 교체로 불가피하게 치중할 수 밖에 없는 실정으로서 금년내 목표달성은        어려울것으로 예상되어

○ ‘94년 4월 이전 준공된 공동주택 공용배관 금년내 교체여부 조사 및 교체        토록 설득시키코자 옥내 노후급수관 교체공사와 직□간접 관련된 과장 및        팀장급 직원으로 구성된 T/F팀을 운영.

▢ 『노후 공용배관 교체 중점추진』을 위한  T/F팀 운영

○ 추진개요

- 추진대상 : 공용주택 105개 단지 (79,611가구)

- 추진기간 : ‘14.10.22(수) ~ 11.19(수)

- 조직구성 : 소장을 팀장으로 과장을 반장으로한 3개반(과)으로 편성

						T/F팀장(소장)
	총괄반(강남,서초)					추진반A(강남)						추진반B(서초)
	반장 : 현장민원과장 반원 : 김생수					반장 : 급수운영과장 반원 : 공문수 반원 : 박종태 반원 : 이승우						반장 : 시설관리과장 반원 : 윤복철 반원 : 이재윤

○ 그 간 추진 경과사항

- ‘14.10.22      T/F팀 발족

- ‘14.10.27      1차 추진 조사보고

- ‘14.10.31      2차 추진 조사보고

○ 추진계획 및 실적

- 11/19 계획대비 방문실적

대 상		계 획(105개 단지)				실 적(105개 단지)				비 고
		10/24	10/31	11/7	11/14	10/24	10/31	11/7	11/14
계	105	15	45	45	-	15	60	23	7	100%
총괄반	37	7	15	15	-	7	22	5	3
추진반A	36	4	16	16	-	4	21	8	3
추진반B	32	4	14	14	-	4	17	10	1

○ 추진실적 유형별 분류

구 분	계	재건축 (리모델링)	수선충담금 부 족	교체의사 없음	대상 재건축(리모델링) 사업시행 인가, 내식성관 기교체를 대상제외로 한다. 제외	향후교체	비 고
계	105	39	3	10	30	23	8,438가구 교체예정
총괄반	37	23	1	-	10	3
추진반A	36	4	1	6	14	11
추진반B	32	12	1	4	6	9

※ 상세현황은 붙임문서 “공용주택 공용배관 교체실태” 참조

▢ 추진결과

○ 향후교체 23개 단지중 2015년 교체 예정계획은

연 번	아파트명	주소	전화번호	준공년도	가구수	비고
계					2,078
1	개포경남	강남구 개포동	572-4400	1984	678
2	수서 신동아	강남구 수서동	459-6486	1992	1,162
3	잠원현대	서초구 반포동	599-2160	1993	238

▢ 향후계획

○ 추진실적 유형중에서 향후교체를 중심으로 중점추진

- 향후교체는 추진대상 105개 단지중 23개 단지 8,438가구로서 ‘15년          ~’18년까지 매년 2,000여 가구 교체수립 예정

(※ 적정한 목표 설정토록 본부와 향후 협의)

- 우선 향후교체 대상건물에 공용주택내 공용 수도배관을 희망교체토록          분기별로 공문발송

- 수시 개별방문하여 교체하는데 있어 불편한점을 사전에 중점적으로 점검          하여 불편해소에 최대강구

- 공용배관 교체 전ㆍ후의 수질홍보를 인체의 건강과 연계시킨 친자연적          홍보강화 (※ 우리사업소 수질팀 협조)

붙 임   1. 공동주택 공용배관 교체실태 1부.  끝.