문서번호	하천관리과-18371
결재일자	2014.11.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		치수관리팀장		하천관리과장
조세호		代전영부		11/20 김용학
협 조

「성내유수지 생태 보완 등 시설정비 」 추진계획

2014. 11.

도시안전실

(하천관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	강동구청	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

「성내유수지 생태 보완 등 시설정비」추진계획

성내유수지 생태 보완 등 시설정비 기본계획 수립용역이 준공되었기 설계 및 공사 등 향후 추진계획을 보고드림

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 성내유수지 생태 보완 등 시설정비

❍ 위    치 : 송파구 방이동 88-11 (유지·관리 : 강동구청)

❍ 유수지 면적 : 67,700㎡

❍ 사업내용 : 생태기능 보강, 체육·휴게 및 악취저감 시설 설치

❍ 사업기간 : ‘14. 7. 4. ~ ’15. 12. 31.

❍ 총사업비 : 2,800백만원

❍ 시 행 자 : 강동구청(설계 및 시공)

□ 추진경위

❍ ’14.04.03 : 성내유수지 정비방안 자문회의 개최

❍ ’14.04.10 : 성내유수지 현장조사 실시

❍ ’14.05.02~13 : 담당부서 실무회의 실시(2회)

❍ ’14.07.04 : 기본계획 용역 착수

❍ ’14.10.31 : 기본계획 용역 준공

□ 기본계획 개요

❍ 사 업 명 : 성내유수지 생태 보완 등 시설정비 기본계획 수립용역

❍ 과업내용 : 성내유수지 개발여건 분석, 기본 구상, 시설 계획 등

❍ 용역기간 : ‘14. 7. 4. ~ 10. 31.

❍ 용 역 비 : 18,580천원

❍ 용 역 사 : 동부엔지니어링(주)

□ 향후계획

❍ ‘14.11.    : 기본계획 성과품 송부 및 예산 재배정

- 예산과목 : 하천관리과, 치수 및 하천 관리, 하천복원 및 정비,
성내유수지 정비, 시설비 및 부대비(시설비)

※ 기본 및 실시설계 용역비 : 116백만원

❍ ‘14.12. ~ ’15. 4. : 기본 및 실시설계 용역

❍ ‘15. 5.    : 공사 착공

❍ ‘15.12.31 : 공사 완료

붙임  1. 성내유수지 기본계획 요약보고서 1부.

2. 기본 및 실시설계 용역비 산출근거 1부.  끝.