투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	(주)신명건설기술공사
(경유)	(도림천 상류 관악산 저류조 설치공사 책임감리원)
제목	실정보고 승인 통보[관악산 저류조 전기공사]

1. 도림천(감) 2014-287(2014.11.14.)호와 관련된 문서입니다.

2. 금년 수방기간 관악산 저류조 운영을 위하여 임시 설치한 분전반(RCS반) 이설에 따른 실정보고사항에 대하여 승인하오니 공사현장 안전관리 및 품질확보에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

□ 실정보고 주요사항

○ 버들골, 공대폭포 분전반(RCS반) 이설

- 임시 설치한 분전반을 유출수문과 인접하여 설치(당초 계획)

○ 각 수문 상부 조명등 설치(6등)

- 비상 시 수동조작 및 유지관리를 위하여 조명등 설치.

- 조명등주 및 등기구 : 관급자재 적용.

붙임 : 실정보고(감리) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이재홍		녹색성장과장	11/20 김창균
협조자
시행	설비부-13033	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문동 서소문청사 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8638	/전송	02-3708-8659	/	hong2495@seoul.go.kr	/	대시민공개