문서번호	급수운영과-28711
결재일자	2014.11.20.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
최호림		김태형	11/20 안재엽
협조

설계변경 보고서

[2014년 광진구 관내 송배수관정비공사 등 건설폐기물처리용역]-1차 최종

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

동부수도사업소

급수운영과

2014년 광진구 관내 송배수관정비공사 등 건설폐기물처리용역

설계 변경 보고서(1차 최종)

『2014년 광진구 관내 송배수관정비공사 등 건설폐기물처리용역』 시행 중 시공물량 증․감 사항이 발생하여 아래와 같이 설계변경(1차 최종)을 시행코자 합니다.

1				용역현황

○ 용 역 명 : 2014년 광진구 관내 송배수관정비공사 등 건설폐기물처리용역

○ 용역개요 : 폐기물운반 - 774㎥, 폐기물처리 - 1,796ton

○ 용역기간 : 2014. 04. 23. ~ 2014. 11. 30.

○ 도 급 자 : **************

○ 도 급 비 : ***********

2				설계변경 개요

○ 설계변경 사유 : 시공물량 증･감 발생

- 시공물량 증･감 현황

․ 폐아스콘 및 폐콘크리트, 폐토석 운반․처리 물량 증가 및 감소

구분	건설폐기물 운반(㎥)		건설폐기물 처리(Ton)		비고
	당초	변경	당초	변경
폐아스콘	694	726	1,630	1,706	증
폐콘크리트	50	33	115	76	감
폐토석	30	-	51	-	감
합계	774	759	1,796	1,782	감

3				공사비 변경 현황

구 분	당 초	변 경	증 ･ 감
용 역 비	**********	**********	***********
공급가액	**********	**********	***********
부가가치세	*********	*********	***********

4				보고자 의견

○ 위와 같은 실정으로 설계변경 사항이 발생하여 우리사업소 설계변경 심의위원회를 개최하여 타당성 여부 등을 검토하고 심의결과에 의거 설계변경을 시행코자 합니다.

첨부 : 설계변경 내역서 1부.  끝.