내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	서울건축 가이드북 및 문화지도 외국어판 제작 설계변경 의뢰

1. 재무과-19695호(2014.4.22.) 및 건축기획과-25263호(2014.11.13.)와 관련입니다.

2. 우리 과에서 진행 중인 「서울건축가이드북 및 문화지도 외국어판 제작」에 대해 과업의 추가 등으로 인한 설계변경(계약금액 증액 및 기간 연장)을 아래와 같이 시행하고자 하니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 계약명 : 서울건축 가이드북 및 문화지도 외국어판 제작

나. 설계변경 내용 : 계약금액 증액 및 기간 연장(2개월)

계약명	용역업체	계약금액(원)		기간연장
		당초	변경	당초	변경
서울건축 가이드북 및 문화지도 외국어판 제작	㈜디자인 수목원	109,950,000	120,000,000	2014.4.17 ～ 2014.12.16	2014.4.17 ～2015.2.16

붙임 : 서울건축 가이드북 외국어판 제작 설계변경 1부.  끝.

	건축기획과장
주무관	이은정		녹색건축팀장	고현정		건축기획과장	11/21 한병용
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	건축기획과-25877	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울시 중구 세종대로 110 서울시청 3층 건축기획과	/
전화	02-2133-7119	/전송	02-2133-0750	/		/	대시민공개