투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	공사 변경계약 의뢰

우리사업소에서 시행 중인 ‘2014년 노후포장구간 노면표시 및 표지병 설치공사(1구역)’에 대하여 변경계약 코자하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2014년 노후포장구간 노면표시정비공사(2구역)

나. 도 급 자 : 비룡건설 대표 김진범

다. 변경내용

1) 준공기한 : 당초 2014. 11. 28. → 변경 2014. 12. 31.

2) 도 급 비 : 금218,184,000원(변동없음)

라. 변경사유 : 하반기 예산추가 재배정에 따른 포장공사 지연

(귀책사유 : 성동도로사업소)

첨  부 : 공사 변경계약 방침서 1부.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	하승환		도로보수과장	11/21 代홍수종
협조자
시행	도로보수과-5170	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울특별시 성동구 자동차시장길 41(용답동) 성동도로사업소 도로보수과	/
전화	02-2210-1566	/전송	02-2210-1549	/	hsh1647@seoul.go.kr	/	대시민공개