문서번호	기전과-9040
결재일자	2014.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전과장	동부도로사업소장
이귀섭	김대진	11/21 송상영

특별도로 교통안전진단 교통신호기 보완공사

설계변경  및 낙찰차액 사용계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11

동부도로사업소

(기 전 과)

특별도로 교통안전진단 교통신호기 보완공사

설계변경  및 낙찰차액 사용계획

본 공사는 특별도로 교통안전 진단에서 도로 교통소통에 지장을 주는 교차로 및 횡단보도의 교통신호시설을 보완하는 공사로, 도로를 이용하는 시민불편 해소 및 안전사고 예방을 위하여 집행잔액 및 낙찰차액을 사용, 노후 교통시설물을 교체하여 쾌적하고 안전한 도시환경을 조성코자 함

관련근거

교통운영과-19093호(2014. 10. 14)『2014년 교통신호기분야 사업추진을 위한 추가 예산배정 (효율적인 예산집행)』

교통관리과-4309호(2014. 2. 19)『어린이 보호구역내 교통안전시설 정비』

예산 집행현황

(단위 : 천원)

공사명	공사개요	예산액	발주금액	계약금액	낙찰차액	집행 잔액	비고
특별도로안전진단 교통신호기 보완공사	- 신호기 설치 - 신호기 이설	253,557	149,660	130,518	19,142	34,146	잡행잔액 이전비 잔액
합 계		253,557	149,660	130,518	19,142	34,146

낙찰차액 및 집행잔액 사용 계획

- 신호등주 노후, 기초파손으로 기울러짐, 케이블 높이제한 미달 등           으로 인한 어린이 보호구역내 교통 안전사고 예방을 위하여 신가        초등학교(송파구 가락동 소재) 신호등을 정비하여 안전한 통학로를        확보코자 함

소요예산 : 53,288천원

(낙찰차액:19,142천원 + 집행잔액:34,146천원)

보고자 의견

낙찰차액 및 집행잔액을 특별도로안전진단 교통신호기 보완공사 포함에 설계변경 시행하여 교통신호기 유지 관리에 만전을 기 하고자 함

붙임 : 관련 공문 2부.  끝.