과 장				팀 장	11/21 이용심	심사자	하현석	설계자	전봉재		설 계	심 사		결 재
											2014년 11월 21일	2014년 11월 21일
변 경 설 계 서(정산)
	용역명 : 한강교량 주변 하상잔재물 조사용역
	구 분					금 액							증·감
						당 초				변 경
	총 용 역 비					\ 203,391,300원				\ 183,150,000			감) 20,241,300
	용역비		공 급 가 액			\ 184,901,182				\ 166,500,000			감) 18,401,182
			부 가 가 치 세			\ 18,490,118				\ 16,650,000			감) 1,840,118
			계			\ 203,391,300원				\ 183,150,000			감) 20,241,300
○ 용역개요 : 하상잔재물 조사 549시간, 잠수부 확인 850개소 ○ 변경내역 : 용역 시행에 따른 잠수부 확인 물량 감소 발생(당초 850개소 → 549개소, 감) 301개소)