문서번호	교통정책과-19057
결재일자	2013.9.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통정책과장	교통정책관
이현정		천정욱	09/09 代천정욱
협조
	도시철도팀장		이우룡

「2013년도 지하철 공기질개선사업」

지하철 운영기관 국고보조금 지출계획

도시교통본부

(교통정책과)

「2013년 지하철 공기질개선사업」

지하철 운영기관 국고보조금 지출계획

지하철 공기질 개선을 통해 대중교통 이용활성화기반조성 및 지하철 이용시민의 건강을 보호하고자 2013년 추경에 편성된 공기질개선사업 국고보조금를 지하철 운영기관에 자본전출금으로 지출하고자 함

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 지하철 1~4호선

❍ 사업내용 : 지하철 공기질 개선을 위한 사업 추진

- 본선환기설비교체, 석면뿜칠재 제거, 석면함유건축마감재철거 등

❍ 사업주체 : 지하철 운영기관 (서울메트로)

❍ 사업기간 : 2013년 ∼ 2014년

□ 추진현황 및 계획

❍ 연도별 추진실적 및 계획

세부사업명	실적		계획
	2011	2012	2013	2014	2015
본선환기설비교체	-	11대	25대	-	103대
석면뿜칠제거	2역	1역	1역	-	7역
석면마감재철거	-	42역	37역	-	-

본선환기설비교체	25대	미아, 교대③, 구파발, 신사, 미아삼거리 등
석면뿜칠제거	1역	용답역(성수, 신정기지)등
석면마감재제거	37역	제기동, 종로5가, 을지로4가②, 성수, 강남, 신도림, 동대입구, 옥수, 압구정, 대청, 노원, 창동, 수유, 충무로③, 이촌, 남태령, 충정로, 아현, 을지로3가②, 신천, 구파발, 녹번, 경복궁, 안국, 종로3가③, 금호, 고속터미널, 남부터미널, 도곡, 학여울, 일원, 수서, 신사, 당고개, 상계, 서울역④, 총신대입구

❍ 2013년 사업대상 현황

❍ 사업추진일정

- 본선환기설비교체 : 2013. 6 ~ 2014.12

- 석면뿜칠제거     : 2013. 6 ~ 2013.10

- 석면마감재 제거  : 2013. 5 ~ 2014.12

□ 예산현황

❍ 예산편성 현황

- 총사업비 : 8,334백만원 (국비 2,500, 메트로 5,834)

- 전출예산 : 2,500백만원 (메트로 2,500)

❍ 예산과목

- 도시철도건설사업비특별회계, 지하철 수송력 증대 및 시설개선  지하철공기질개선, 공사공단자본전출금(404-02)

□ 자본전출금 지출계획

❍ 지출시기 : 2013년 9월중

- 원활한 사업추진을 위해 전액 지급

❍ 지출방법 : 지출결의에 의한 지하철운영기관에 자본전출금 지출

붙임 : 국고보조금 교부결정통지서 1부. 끝.