문서번호	총무과-14107
결재일자	2013.9.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	총무과장	총무부장		한강사업본부장
임이환	김영기	정진일		09/09 한국영
협 조

태양광 발전설비 설치계획

2013. 9.

한 강 사 업 본 부

총 무 부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	신재생에너지	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	서울시, 에너지관리공단	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

태양광 발전설비 설치계획

청사(안내센터 등)에 태양광 발전설비를 설치하여 전력위기 극복 및 온실가스 배출량 저감으로 기후변화에 대응하고 서울시에서 역점사업으로 추진중인 원전하나줄이기 종합대책에 적극 동참하고자 함.

Ⅰ		추진근거

○ 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법

○ 신·재생에너지 설비의 지원·설치·관리에 관한기준

○ 서울특별시 에너지기본조례, 서울시 원전 1기 줄이기 종합대책

-『원전하나줄이기 종합대책』 시장방침 143호(2012.5)

○ 녹색에너지-14734(‘13.7.30) 『‘13년 신재생에너지 추진철저』

Ⅱ		설치현황 및 계획

○ 기설치 현황

연번	센터명	설치년도	용량(KW)	발전량(월)	설치비(천원)	비고
1	광나루안내센터	2009. 12. 9	10	966Kwh	83,900
2	잠실안내센터	2009. 12. 9	10	966Kwh	83,900
3	뚝섬안내센터	2009. 12. 9	20	1,932Kwh	161,000
4	반포안내센터	2009. 12. 9	5	483Kwh	41,950
5	이촌안내센터	2009. 12. 9	10	966Kwh	83,900
7	양화안내센터	2009. 12. 9	15	1,449Kwh	122,500
8	잠원안내센터	2009. 12. 9	15	1,449Kwh	122,500
9	망원안내센터	2009. 12. 9	15	1,449Kwh	122,500
	계	9개소	100	9,660Kwh	822,150

○ 설치계획

종류	설치장소	위 치	규모 (KW)	설치면적 (㎡)	설치비 (천원)	예산지원
합 계	5개소		75	521	341,372
태양광발전	본부청사	성동구 강변북로 257	20	139	94,327	국비50%+시비50%
	여의도안내센터	영등포구 여의동로 330	15	104	67,376
	여의도샛강센터	영등포구 여의도동4-9	15	104	67,376
	난지안내센터	마포구 한강난지로 162	10	70	44,917
	소 계		60	417	273,996
	강서안내센터	강서구 양천로 27	15	104	67,376	시비 100%

※ 사업비는 지식경제부에서 고시한 기준단가에 의거 적용.

정산대비 매칭사업(국비+시비)와 순수 지방비 사업 분리발주 실시

(기후환경본부의 녹색에너지과 햇빛발전팀 의견)

☞ 선정기준 : 본부 및 센터의 태양광 미설치된 장소중 일조량이 우수한곳

☞ 용량선정

- 지식경제부에서 신재생에너지 지방보급사업 심사시 한전측 전기사용량

증빙고지서 확인대조후 용량의 적정성 검증완료

- 태양광 발전설비 설치대상 시설별 전년도 월평균 전기사용량(kwh)의

30%내외의 범위에서 용량산정하여 과다설계 지양

- 옥상 유휴면적(자투리)에 따라 발전용량 산정

☞ 운영방법

- 태양광발전으로 생산된 전력은 안내센터 기존 전기분전반에

공급(계통연계)되어 우선 사용되고 부족분은 (주)한국전력의

전기를 사용함으로서 전기요금 절감

☞ 설치방법 및 조건

- 옥상에 조경시설은 잘 보존하고 유휴공간(자투리)만 활용 설치

- 일조량이 우수한 남측으로 설치하여 발전량 최대효율 확보

- 모듈간의 간격 유지로 빙설통로 확보 및 풍압발생시 위험요소 제거

- 계약자는 구조기술사의 건물 안전진단서 제출후 시공토록 조건부여

Ⅲ		세부추진계획

<구매설치>

○ 조달구매 발주

- 발전효율이 매우 우수한 국내 최고의 제품 선정

- 신뢰성 있는 납품․시공 업체를 선정하여 부실시공 방지

- 준공후 향후 5년간 시설물의 운영ㆍ관리, 유지ㆍ보수 등에 대한 사후관리

책임을 성실히 이행 할 수 있는 제품

- 현장 제작ㆍ설치조건

○ 시공금액 : 343,215천원(부가세+조달수수료포함 단, 감리비는 제외)

○ 시공대상 : 5개소<본부, 센터 4(여의도,여의도샛강,난지,강서)>

○ 시공규모 : 본부20KW,센터55KW(여의도15,샛강15,강서15,난지10)

<감리방법>

○ 관련근거 : 전력기술관리법 제12조 1항 및 동법 제20조 1항

○ 감리선정 : 소액으로 자타가 공인하는 국내 최고의 태양광 감리

실적과 기술력을 보유한 업체와 수의계약하여 시공

품질 및 발전효율 극대화하되 저렴한 견적서를 제출한 업체

○ 수의근거 : 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제25조

제1항제5호 추정가격 3천만원이하인 물품의 제조․구매․

용역의 경우

○ 용역금액 : 17,800천원(부가세 포함)

○ 감리임무 : 공정관리, 시공관리, 품질관리, 안전관리, 기성 및 준공검사 확인 등

Ⅳ		예산사용

○ 예 산 액 : 365,500,000원(시비 255,850,000, 국비 109,650,000)

- 시설비 347,600,000원, 감리비 17,900,000원

○ 예산과목

- 에너지절약과 생산으로 원전하나 줄이기/신재생에너지보급/공공시설

신재생에너지보급/시설비

- 에너지절약과 생산으로 원전하나 줄이기/신재생에너지보급/공공시설

신재생에너지보급/감리비

Ⅵ		기대효과

○ 공공부문 솔선수범으로 민간 선도와 기후환경 보호를 위한 온실가스      배출저감 기여

○ 동절기 및 하절기 에너지 사용제한에 대한 실효성 있는 전력위기 대비

○ 화석연료의 사용으로 인한 자원의 고갈, 온난화 현상, 환경문제      를 해소

○ 금번 태양광발전시설 설치로 년간 전기사용량 122,400kwh, 전기      요금은 12,240천원 절약되고

○ 이로인한 년간 55톤의 이산화탄소 배출이 감축되며 이는 소나무        4,622그루 조성하는 대체효과가 있음.

Ⅶ		향후추진일정

○ 발주방침서 작성  : 2013. 9. 10

○ 품의서 작성 및 발주  : 2013. 9. 13

○ 감리업체 계약    : 2013. 9. 26

○ 시공감리 착수    : 2013. 9. 30

○ 제작 및 설치기간 : 2013. 9. 30 ~ 10. 31

○ 시운전 및 검수   : 2013. 11. 5

○ 시공 및 감리준공 : 2013. 11. 11

첨부  1. 태양광설치 사례사진 1부.

2. 감리비 산출내역서 1부.  끝.