투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시중랑물재생센터소장(물재생과장)
(경유)
제목	중랑물재생센터 고도처리 개량공사 인수전 협조 요청사항 회신

1. 중랑센터 물재생과 – 6348(2014.11.18.)호와 관련입니다.

2. 중랑물재생센터 고도처리 개량구간 인수ㆍ인계와 관련하여 보완 요구 사항을 따로븥임과 같이 회신합니다.

연번	보완요구사항	조치계획	비고
1	미세목, 세목스크린 설치업체 부도로 인한 하자보수계획	하자처리업체 선정완료 및 보증보험사 협의진행(‘14.11월말 완료예정) 중으로 ’14.12.15 하자보수 완료예정
2	조절용 송풍기 추가설치공사건에 대한 세부공정	조절용 송풍기 추가설치 완료,전기배선 및 시운전 11월28완료예정
3	인수ㆍ인계 전까지 각종예비품 납품	납품완료

붙임  인수ㆍ인계 보완 요구사항 조치계획 1부.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	송민영		방재시설과장	서관석		방재시설부장	11/21 임춘근
협조자
시행	방재시설부-12074	(		)	접수		(		)
우	100-191	서울 중구 덕수궁길15 (서울시 서소문별관 2동2층)	/
전화	02-3708-8783	/전송	02-3708-8756	/	songmy01@seoul.go.kr	/	대시민공개