함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	준공기한 연기의뢰(광암아리수정수센터 시설물 정밀안전진단 용역)

1. 우리 정수센터에서 시행중인『광암아리수정수센터 시설물 정밀안전진단 용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 광암아리수정수센터 시설물 정밀안전진단 용역

나. 계약업체 : ㈜한국시설안전연구원 대표 안평기

다. 계약금액 : 금일억이천이백사십이만팔천원정(\122,428,000)

라. 준공기한 연기

- 당초 : 2014.06.02. ~ 2014.12.01

- 변경 : 2014.06.02. ~ 2014.12.29

마. 연기사유 귀책소재 : 광암아리수정수센터

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

사. 선금 지급여부 : 미지급

아. 연기사유 : 물청소 일정 차질 등으로 인해 현장조사가 당초 계획보다 늦어져             절대공기 부족

따로붙임 : 1. 준공기한 연기보고서 1부.

2. 합의서 1부.  끝.

	광암아리수정수센터소장
주무관	양봉우		정수시설과장	代조귀현		광암아리수정수센터소장	11/21 차윤기
협조자	주무관	유혜영		정수운영과장	代지호선
시행	정수시설과-2980	(		)	접수		(		)
우	465-230	경기도 하남시 서하남로 293(광암동 174)	/
전화	3146-5384	/전송	3146-5309	/	ybw13@seoul.go.kr	/	대시민공개