문서번호	건축부-13980
결재일자	2014.11.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
신현성		양기정	11/21 김우성
협조

장충체육관 리모델링공사

공사관련 변경사항 실정 보고

2014. 11.

도시기반시설본부 건축부

장충체육관 리모델링공사

공사관련 변경사항 실정 보고

장충체육관 리모델링공사에 따른 공사관련 변경사항에 대한 책임감리자 실정보고 처리 방안임.

1		관련 근거

◌ JCR-기술-14-363호 : 복합판넬구간 단열재 변경 검토보고

◌ JCR-기술-14-342호 : 흡음배풀 시공 검토 보고

◌ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조(설계변경으로 인한 계약 금액의 조정)

2		변경 내용

◌  주요변경 사항

구분	변경 전	변경 후	비 고
복합판넬구간 옆면 단열재	- 그라스울 64Kㆍ 100㎜	- 경질 우레탄 뿜칠 70㎜	시공기간 단축을 위한 변경 열관류율 및 열전도율 향상
흡음	- 관람석 집중형 (600*1200-374개)	- 3층 복도 목모 흡읍보드 설치	휀 작동시 흡음배풀 흔들림으로 탈락우려 흡읍배풀 삭제 후 3층복도에 흡음보드설치

- 단열재 경질 우레탄이 가격이 상승하나, 시공사에서 금액 변경 없이 시공하기로 함

3		공사비 증가 현황

항 목	실정보고 공사비현황 (원)			비 고
	당초	변경	증감
단열재 변경			0	변경없음
흡음관련			-	정산예정

4		처리 방안

◌ 책임감리원의 의견이 변경함이 적정하다고 판단하였으므로  실정보고를 승인하고자 하며 우선시공 후 설계변경 등 정산 절차를 이행하고자 함.

따로붙임 : 책임감리원 실정보고서.  끝.