투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	9호선 2단계 구간 29주차 시운전 계획 송부(‘14.11.24~11.28)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 9호선 2단계 구간 29주차 시운전 계획을 아래와 같이 송부하오니 업무에 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 29주차 시험기간 : 2014. 11.24.(월), 11.27(목) ~ 11.28.(금)

나. 시험구간 : 2단계 연장 구간(926~930구간)

다. 시험내용 : 전편성 자동운전 시험(확인시험), PSD연동시험

일 자	시 험 내 용	열 차 운 행
11.24(월)	○ 전편성 자동운전 시험(확인시험) 1) AUTO모드 운행(일반, 급행) 2) FA 모드운행(일반, 급행) 3) 정위치정차	- 927편성 - 차량출고 : 10:00 - 차량입고 : 16:00이전 (연장구간 출발)
11.25(화) ～ 11.26(수)	○ PSD,차량 연동시험 준비 - 가동부, 장애물센서 점검 등	- 열차운행 없음
11.27(목) ～ 11.28(금)	○ PSD,차량 연동시험 - AUTO모드 일반열차운행(반복)	- 차량출고 : 11.27(목) 10:00 - 차량입고 : 11.28(금) 16:00이전 (연장구간 출발)

라. 협조사항

1) 시험열차 1편성 배정(시운전 상황실 통보)

2) 기관사/전수시험자 지원, 차량정비, 청소.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울메트로사장,서울시메트로9호선(주),서울9호선운영(주),메인트란스(주)
주무관	이진근		차량과장	황영일		도시철도설비부장	11/21 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-10694	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 예장동 산5-85 (삼일대로 231) 서울시남산청사 4층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7291	/전송	02-772-7308	/		/	대시민공개