문서번호	건축부-13984
결재일자	2014.11.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
윤용훈		강성욱	11/21 김우성
협 조
	주무관			정광식
	주무관			임성은
	주무관			조영두
	주무관			김대식

『서남권야구장 건립공사 전면책임감리용역』

총차 및 8차분 계약변경 시행 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『서남권야구장 건립공사 전면책임감리용역』

총차 및 8차분 계약변경 시행 보고

「서남권야구장 건립공사 전면책임감리용역」관련 총차 및 8차분  계약변경 시행 보고

1		용역개요

○ 용  역  명 : 서남권야구장 건립공사 전면책임감리용역

○ 총용역기간 : 2008.12.30~2015.03.31 (8차 : 2014.03.07~2014.11.26)

○ 총계약금액 : 7,228,800천원

○ 계  약  자 : (주)선엔지니어링건축사사무소 외 2개사

2		추진경위

○ 2014.03. 06 : 총차 계약변경 및 8차분 계약시행 보고

○ 2014.07. 14 : 감리원 배치조정 검토 보고

○ 2014.11.20 : 감리용역 계약연장 검토·보고(선종합건축 2014-1883호)

3		총차 및 8차분 계약변경

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
용역기간	총차	2008.12.30 ~ 2015.03.31	2008.12.30 ~ 2015.03.31	-	변경없음
	8차	2014.03.07 ~ 2014.11.26	2014.03.07 ~ 2015.03.31	125일 연장	기간연장
계약금액	총차	7,228,800	7,063,500	165,300(감)	감 액
	8차	1,159,000	1,159,000	-	변경없음

※ 총차 : 계약기간 변경없이, 계약금액 165,300천원 감액

※ 8차 : 계약기간(‘14.11.26→’15. 3.31)변경, 계약금액 변경없음(추후 정산)

현안사항 검토

○ 8차 계약기간이 ‘2014.11.26일에 만료되고, 시설개선 사업추진관련 공사기간의 연장이 예상되고 있어, 총차 계약기간(2015. 3.31)까지 8차 계약기간 연장이 필요함.

○ 8차분 계약기간 연장시 감리용역비 1,478,500천원이 필요하나 2014년도 예산 1,159,000천원으로 계약되어 319,500천원이 부족함에 따라,        (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
8차 계약	1,159,000	1,478,500	319,500(증)	당초 금액으로 계약 후 추후 조정

○ 당초 금액으로 우선 계약하고, 감리비 부족분은 2015년 감리비 등으로 계약금액  조정(정산)이 필요함.

※ ‘14. 7월 시공사 직원 배치조정에 따른 감리원 배치조정으로 감리비 243,193천원이 절감됨.                                                                      (단위 : 천원)

구 분	당초 계약	2014.11.26 (준공시 : 정산)	증 감	비 고
8차 계약	1,159,000	915,806	243,193(감)	감리원 배치조정으로 감리비 절감

4		처리의견

○ 총차 공사기간(‘15.02.28)을 시설개선 사업추진과 관련하여 공기연장 예정으로, 공사기간 연장을 감안하여 8차분 감리용역 기간을 연장(‘14.11.26 → ‘15. 3.31)

○ ‘14.12.01부터 투입예정인 건축1 및 기계2 감리원은 우리본부의 승인을 받은 후 배치

○ 기 계약된 1,159,000천원으로 8차 계약금액 변경없이 감리용역 기간을 연장계약하고, 부족한 감리비는 추후 확보하여 계약금액 조정(정산)

○ 총차 계약금액(감액) 및 8차 계약기간(연장)을 변경계약 의뢰코자 함.

따로붙임  1. (총차 및 8차) 감리용역 계약연장 검토·보고 1부.

2. 감리용역 검토의견서 1부.

3. 내역서 및 배치표 각1부.

4. 감액 산출내역서(총차 및 8차) 각1부.  끝.